2010년도

녹색성장 추진상황 점검․평가 결과보고

광역기획담당관실

목      차

Ⅰ. 총    평	1

Ⅱ. 점검․평가 개요	2

Ⅲ. 추진경과	3

Ⅳ. 점검․평가 결과	5

Ⅴ. 주요 점검․평가 내용	7

Ⅵ. 향후계획	18

※ 붙임자료

❍ 2010년 단위사업별 녹색성장 추진상황 점검․평가 결과 총괄	19

❍ 2010년 단위사업별 점검․평가표	29

2010년도 녹색성장 추진상황 점검․평가 결과보고

Ⅰ		총 평

▣『Green 인천 건설』의 비전을 가지고 4대 전략 및 20대 주요 추진

과제의 저탄소 녹색성장 5개년(‘09～’13년) 계획을 수립하고, 이에 따른 실행계획으로 27개 부서(기관) 95개 사업에 대한 2010년

녹색성장 추진계획을 수립하였음.

▣ 2010년 95개 사업의 추진상황에 대한 점검․평가를 실시한 결과

❍ 총 95개 사업중 계획변경 5건(5.3%), 완료 17건(17.9%), 정상추진

68건(71.5%), 미흡/지연 5건(5.3%)임.

❍  예산의 계획대비(1조8,378억원) 집행실적은 (1조 6,966억원)으로서,

약 92.3%의 집행률을 보이고 있음.

▣  4대 전략 및 20대 추진과제에 따른 점검․평가결과는 아래의 표와 같이 정리할 수 있으며 상대적으로 기후변화 대응 및 적응 분야의 집행 실적이 타 분야에 비하여 높은 것으로 나타나고 있음.

(단위 : 억원, 사업)

구 분	예산액	집행액 (집행률)	계	계 획 변 경			추 진 결 과
				소계	취소	재검토	소계	완료	정상	지연 /미흡
계	18,378	16,966 (92.3%)	95	5 (5.3%)	2	3	90	17 (17.9%)	68 (71.5%)	5 (5.3%)
기반구축 및 녹색생활혁명	5,465	5,277.5 (96.6)	26	1		1	25	7	16	2
기후변화 대응 및 적응	110,884	199,862 (180.2)	10				10	5	5
녹색기술 개발 및 녹색산업 육성	923,489	782,424 (84.7)	31	1	1		30	2	26	2
녹색공간 창출 및 저탄소 도시 인프라 확충	798,010	709,032 (88.9)	28	3	1	2	25	3	21	1

▣ 향후 녹색성장사업을 개선하기 위해서는 도입 초기단계의 녹색성장위원회 기능을 활성화하여 녹색성장계획과 집행의 추진체계를 정비하고, 계획한 사업이 실제 반영될 수 있도록 녹색성장기본법의 제정 취지에 맞게 활동을 강화해 나갈 필요가 있음

Ⅱ		점검․평가 개요

ꏚ 관련 근거

❍ 저탄소 녹색성장 기본법 및 시행령

❍ 인천광역시 저탄소 녹색성장 기본 조례 제5조제1항

제5조(추진상황 점검·평가) ① 시장은 법 제12조제2항 및 영 제9조제1항에 따라 추진계획의 이행 상황을 매년 점검ㆍ평가하여 그 결과를 시의회에 보고하고 지체 없이 이를 법 제14조에 따른 녹색성장위원회에 제출하여야 한다.

ꏚ 대상기간 : 2010. 1. 1 ～ 12. 31

ꏚ 대상업무 : 2010년 녹색성장추진계획의 95개 사업

❍ 기반구축 및 녹색생활혁명 : 26개 사업

- 나무은행 운영, 그린스타트 실천운동, 그린 홈닥터 등

❍ 기후변화 대응 및 적응 : 10개 사업

- 온실가스 감축, 건물 및 옥상 녹화사업, 숲 조성 등

❍ 녹색기술 개발 및 녹색산업 육성 : 31개 사업

- 녹색상품개발 및 보급, 그린 컨설팅, 테마마을 조성 등

❍ 녹색공간 창출 및 저탄소 도시 인프라 확충 : 28개 사업

- 첨단 교통체계 구축, 친환경 도로 조성, 자전거이용 등

ꏚ 대상기관 : 27개 부서(기관)

* 19개 실⋅과, 아시아경기대회지원본부, 인재개발원, 보건환경연구원,

농업기술센터, 경제자유구역청, 도시철도건설본부, 강화군, 옹진군

ꏚ 점검․평가방법 : 사업별 성과목표 대비 추진실적, 향후 추진계획, 문제점, 개선대책, 제출서류 등을 분석

ꏚ 점검․평가결과 구분

❍ 계획변경 : 사업추진 과정에서 발생한 행정(외부)여건, 지역여건, 예산 미확보 등으로 사업의 취소 또는 전면 재검토가 필요한 경우

❍ 추진결과

▶ 완     료 : 법 제도적 정비, 행사 등 일회성 사업 및 중․장기 계획사업으로서

당해연도 목표치 완료한 경우

▶ 정    상 : 연차별 추진중인 사업중 당해연도에 정상적으로 추진한 경우

▶ 지연/미흡 : 사업추진이 행정(외부) 여건으로 인하여 다소 지연 또는 미흡한 경우

Ⅲ		추진경과

❍  ‘09. 7. 14 : 녹색성장 국가전략 및 5개년 계획(국무회의 의결)

- 국가전략 녹색성장 3대 전략 10대 과제

◈ 기후변화 적응 및 에너지 자립
	▪ 탄소에 대한 종합․체계적인 관리 체계 구축 ▪ 기후변화 인지․대응체계 구축을 통해 국민 생활 안정성 제고 ▪ 에너지 저소비․고효율성 사회구조 구축, 탈석유․에너지자립 기반 구축 등
◈ 신성장동력 창출
	▪ 민간부문의 녹색기술, 산업 개발 활성화 ▪ 기존 산업의 녹색혁신, 자원순환형 경제․사업구조 구축 ▪ 신성장동력 첨단융합산업 육성, 고부가서비스산업 육성 ▪ 녹색금융, 탄소시장, 녹색일자리 창출 등 경제 순환 구조 확립 등
◈ 삶의 질 개선 및 국가 위상 강화
	▪ 녹색성장 분야 선진국가 구현, 세계적 녹색성장 모범국가 구현 ▪ 녹색생활 체험 교육 확충, 제도정비, 생태관광 활성화 등 실천기반 마련 ▪ 녹색국토․도시조성, 녹색교통체계 구축, 생태공간 확충등 환경개선

❍  ‘09. 7. 28 : 인천광역시 녹색성장위원회 구성 및 운영계획 수립

- 녹색성장 위원회 : 4개 분과 32명(당연직 11명, 위촉직 21명)

❍ ‘09. 10. 22 : 2009 위원회 정비지침시달에 따른 위원회 구성 변경계획수립

❍ ‘09. 12. 26 : 인천시 녹색성장 5개년(’09~13) 추진계획 수립 제출

❍ ‘10.  3. 26 : 2010년도 녹생성장 추진계획 수립

❍ ‘10.  4. 14 :『저탄소 녹색성장 기본법』 시행

❍ ‘10.  4. 14 :저탄소 녹색성장 기본 조례 제정 계획 수립

❍ ‘10. 11. 15 :『인천광역시 저탄소 녹색성장 기본 조례』 공포시행

❍ ‘11.  4. 25 : 2011년도 녹색성장 추진계획 수립

❍ ‘11.  5.  4 : 제1회 인천광역시 녹색성장위원회 개최

- 2010년도 녹색성장 추진상황 점검․평가 결과 보고

- 2011년도 녹색성장 추진계획 보고

Ⅳ		점검․평가 결과

ꏚ 점검․평가 대상 및 결과(집계표)

(단위 : 사업)

구 분	예산액	집행액 (집행률)	계	계 획 변 경			추 진 결 과
				소계	취소	재검토	소계	완료	정상	지연 /미흡
계	18,378	16,966 (92.3%)	95	5 (5.3)	2	3	90	17 (17.9%)	68 (71.5%)	5
기반구축 및 녹색생활혁명	5,465	5,277.5 (96.6)	26	1		1	25	7	16	2
기후변화 대응 및 적응	110,884	199,862 (180.2)	10				10	5	5
녹색기술 개발 및 녹색산업 육성	923,489	782,424 (84.7)	31	1	1		30	2	26	2
녹색공간 창출 및 저탄소 도시 인프라 확충	798,010	709,032 (88.9)	28	3	1	2	25	3	21	1

□ 계획변경 사업(5개 사업)

연번	사 업 명	계획변경 사유	비고
1	녹색재단(가칭) 설립 추진	․재단 설립에 막대한 재원이 필요하나, 지역경제 및 시의 재정여건으로 보류	재검토
2	공공기관 청사 에너지 절감	․공공기관 에너지절감 목표관리제 사업과 중복으로 취소	취소
3	하수처리수 재이용 인프라 확대 (굴포천 유지용수 공급)	․굴포하수처리장의 방류수 수질기준 강화로 총인저감시설 설치 예정에 따라 예산 중복투자 방지를 위해 재검토	재검토
4	보행자 중심의 Green Parking 사업 추진	․부평구 해당 지역주민의 동의가 이루어 지지 않아 사업취소 및 예산삭감	취소
5	강화 조력발전소 공동 개발사업	․민관검증위원회를 구성하여 강화갯벌 및 환경에 미치는 영향에 대한 전반적인 문제점 재검토	재검토

□ 지연/미흡사업 (5개 사업)

연번	사 업 명	지연(미흡) 사유	비고
1	녹색성장위원회 구성 및 운영	․위원회 운영 근거 조례 10.11.15 공포 ․위원회 재구성 및 운영 지연
2	친환경 에너지 관련 제도 정비	․에너지 기본 조례의 분과위원회 활동 사항이 “저탄소 녹색성장 기본 조례”와 중복되어 해당부서의 검토중
3	복합 신․재생에너지 설치사업	․재원확보(국비매칭분) 지연에 따른 착공 시기 다소 지연
4	철새와 함께하는 도심 하천 가꾸기	․시 재정여건으로 사업비 확보 지연에 따른 사업추진 지연
5	도심형 자전거 보급	․시 재정여건으로 사업비 확보 지연에 따른 사업추진 지연

□ 완료․정상추진 사업

❍ 완료사업 17건, 정상 68건을 포함한 85건(89.5%)사업이 계획대로 집행된 것으로 나타남

Ⅴ		주요 점검․평가 내용

ꏚ 기반구축 및 녹색생활혁명 : 26개 사업

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
1	저탄소 녹색성장 기본 조례 제정	․조례 제정 및 시행(‘10.11.15)	완료
2	녹색성장위원회 구성 및 운영	․저탄소 녹색성장 기본 조례 제정(‘10.11.15) 이후 추진에 따른 지연 ․‘11.2월중 위원회 재구성 및 위원회 개최	지연
3	녹색성장 세부시행계획 수립 및 신규사업 발굴	․2010년 녹색성장 세부시행계획 수립(‘10.3.26) ․상반기 추진상황 점검(‘10.7.22)	완료
4	친환경 에너지관련 제도 정비	․에너지 기본조례 및 친환경․에너지 건축기준에 관한 조례 개정을 위한 자료수집	지연
5	기후변화 대응관련 제도 정비	․기후변화대응조례 제정(‘10.1.18) ․기후변화대응 종합계획 수립(‘10.3월)	완료
6	녹색재단(가칭) 설립 추진	․재단설립에 따른 재원조성의 어려움으로 보류	계획변경 (재검토)
7	나무은행	․소나무, 은행나무 등 4,729주 보존 및 재활용 * 지속적인 훼손위기 수목 보전과 식재를 통해 녹지율 증대 필요	정상
8	탄소배출권 거래 시범 사업	․30개 공공기관의 전력, 난방, 공용차량 유류사용량, 열(스팀)에 대한 배출량 산정 및 검증 → 495톤, 13,264천원 사이버 가상거래	정상
9	인천도시철도 2호선 청정 개발체제(CDM)사업	․CDM 사업자 선정 및 과업착수 - (주)사우스퍼시픽사&스위스 그루터사 * 실효성 있는 성과가 발생하도록 적극 추진 필요	정상
10	건강하고 활력 있는 환경 단체 육성	․5개 분야, 8개 단체, 786백만원 지원 - 인천의제21 실천협의회, 인하대병원 환경보건센터, 인천지역환경기술개발센터, 체험환경교육프로 그램(3개 단체), 지구의 날 행사, 환경의 날 행사	정상

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
11	기후변화 전문강사 순회 교육	․시민, 학생대상 순회교육 : 885회 38,000명 실시 * 온실가스 줄이기 녹색생활 실천 정착을 위해 지속적인 교육실시 필요	정상
12	산업계 기후변화 대응 상설 기후학교 운영	․기업, 실무자, 환경오염방지 시설업체, 환경관리인 대상으로 기업인의 자세 및 대응사례 내용으로 기후학교 9회 1,500명 운영	정상
13	공공기관 에너지 담당자 직무능력 배양	․직무능력 배양 : 7회 504명 - 에너지, 기후변화정책 종합설명회 : 1회 150명 - 유관기관 워크숍 : 2회 96명 - 공공기관 담당자 교육 : 2회 255명 - 전문기관 위탁교육 : 1회 2명 - 에너지담당공무원 해외연수 : 1회 1명	완료
14	저탄소 녹색통장 갖기운동 (탄소포인트) 추진	․가정, 상가, 건물 소유주(세대주) 대상으로 녹색 통장갖기 운동 모집 : 47,800세대(누계 53,000세대) ․탄소포인트 검증 : 36,706세대, 442,872kg CO2 감축(감축율 3%)	정상
15	탄소발자국 아파트 운영	․탄소발자국 우수아파트 지정 : 9개 군구 98개소 ․모니터링 실시 결과 우수아파트 인센티브 지급 : 27개 아파트	정상
16	탄소-포인트제도 시행	․탄소-포인트제도 참여가정 모집 : 5,906세대 ․시행결과 - 우수가정 2,478세대 81,530천원 포인트 지급 - 도시가스 43,967㎥ 절감 - 온실가스 98.1tCO2 감축	정상
17	그린스타트 인천네트워크 실천운동 확산	․그린리더 양성 : 972명(기후강사 84명, 기후지킴이 840명, 청소년 기후지킴이 48명 ․기후변화 체험관 홍보부스 운영 : 58회 13,500명 참여 ․녹색 응원문화 조성 캠페인 실시 : 3회	정상
18	에너지 절약 및 효율화 실천 홍보	․에너지 절약 홍보 : 6건 - 반상회, Green Sports 구현 리플렛, 에너지절약 홍보리플렛, 초중 교육교재, 녹색생활 실천 교통 카드, 에너지절약 탁상용 달력 ․녹색생활 캠페인 전개 : 5회 - 100만명 서면운동, Green Day 행사, 녹색생활 실천, 여름철 전기절약, 에너지 절약	정상

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
19	Green Food 운동	․Green Food 운동 참여업소 : 680개소 ․음식문화 개선방송 : 3,600회 실시 * 대부분 시민들은 음식문화 개선에 대하여 필요 성을 인식하고 있으나 현장에서 실천 참여의지 부족 → 지속적인 홍보, 계도 필요	정상
20	탄소발자국 모니터링	․녹색행사 모니터링 실시 : 15회 - 모니터링 결과 : 탄소발생 총량 75,173kg CO2 - 탄소상쇄금 산정액 : 3,758천원 * 인천시 모든 행사에 탄소발자국 모니터링 실시, 탄소발생량에 대한 상쇄금 징구방안 강구 필요	정상
21	공공기관 LED 조명기기 보급	․10개 군구 공공청사에 LED 조명기기 6,090개 교체	정상
22	친환경 녹색도시 성장을 위한 창조적인 인재양성	․저탄소 녹색성장 교육과정 운영 : 20회 1,007명 - 기본교육(신규채용자반) : 소양과목 3회 386명 - 장기교육 소양과목 : 2회 20명 - 전문교육(저탄소 녹색성장과정, 자전거이용활성화 과정 등) : 15회 571명	완료
23	글로벌 3대 물포럼 육성	․2010세계도시 물포럼 개최 - 기간 : ‘10.8.10～8.12(3일간) - 내용 : 7개 주제, 29개 섹션, 워크숍 7개, 심포지엄 2개, 기조연걸 2명 - 참여인원 : 25개국 1,700명	정상
24	ICLEI 세계환경회의 개최 추진	․2010 ICLEI 세계환경회의 개최 - 기간 : ‘10.10.5～10.7(3일간) - 내용 : 개폐막식, 기조발표, 주제별 섹션 등 - 참여인원 : 1,800명(해외 133개 도시 264명 참가)	완료
25	EAAF 파트너쉽 사무국 협력체계 구축	․EAAF 파트너쉽 사무국 운영(24개 회원) - 철새 서식지 확인 및 실태조사, EAAF 웹 백과사전 등록, 파트너 가입 유치 4개소, EAAF 서식지 사이트 인증 2개소 등 활동	정상
26	녹색구매로 저탄소 사회 조성	․제8회 인천국제환경기술전 개최(‘10.10.5～10.8) - 208기업 389부스(해외 12개국 22기업 참여) ․친환경 상품 상설 전시판매장 개소(‘10.7.29) ․녹색구매 활성화 추진 - 11개 기관 친환경상품 구매 촉진에 관한 조례 제정 완료(시, 10개 군구) - 친환경상품 구매담당자 교육 실시 * 친환경상품 상설전시판매장 활성화 방안강구 필요	완료

ꏚ 기후변화 대응 및 적응 : 10개 사업

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
1	기후변화 종합대책 수립	․기후변화 종합계획 수립 완료(‘10.3월) * 기후변화 종합계획에 따른 연차별 세부시행계획 수립 빛 실효성 있는 추진방안 강구 필요	완료
2	Low Carbon IFEZ 30 추진	․Low Carbon IFEZ 30 Action Plan 수립용약 착수 (인천발전연구원, 기후변화센터) ․‘11.4월 최종보고회 개최계획	정상
3	인천국제공항 온실가스 감축	․문화복지관에 550kw 태양광 발전설비 설치완료 ․고효율 LED 램프 6,726개 설치완료, ․친환경 하이브리드 자동차 2대 구입 ․항공기 전용 경량형 화물탑재용기 386개 보급	완료
4	온실가스 인벤토리 구축	․온실가스 배출량 8개 지역 조사완료 - 남구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군 ․‘11년도에 중구, 동구 조사계획	정상
5	온실가스 발생 모니터링 및 식물․수목의 온실가스 감축능력 실태조사	․온실가스 측정망 설치 : 2개소 ․온실가스 변화 관측 : 87,480건 ․식물, 수목의 탄소 흡수능력 조사 : 396회 ․녹지대 대기정화 효과 조사 : 208회 * 조사자료 적극 활용 필요	완료
6	건물 및 옥상녹화 사업	․건물 및 옥상녹화 : 동구 재능대학 등 24개소 7천㎡ * 설치된 수목 및 휴게시설 등 시설물 사후관리 철저 필요	정상
7	도심속 생명의 숲 1천만 ㎡ 늘리기	․공원, 녹지 조성 : 1,614천㎡ - 공공 : 공원, 녹지, 웰빙 녹지, 학교 생태 숲, 공공시설 숲 - 민간 : 담당, 옥상녹화, 아파트단지 조경 등 * ‘06.7～’10.6 기간동안 총 14,327천㎡ 완료	정상
8	기후변화 정보공유	․시 홈페이지에 기후변화관련 정보공유 : 20회 ․동영상 제작 1개(5분용) : 교육용 활용 및 홈페이지 게재 홍보	완료
9	그린 통합데이터 센터 (IDC) 구축	․통합데이터센터 건립 : 진척도 54% ․‘11. 8월 준공예정	정상
10	종이없는 녹색 세정정보화 추진	․전자고지 : 6회 4개 종목 142,894건 - 면허세 : 1회 5,701건 - 자동차세 : 2회 45,093건 - 재산세 : 2회 59,615건 - 주민세 : 1건 32,485건	완료

ꏚ 녹색기술 개발 및 녹색산업 육성 : 31개 사업

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
1	녹색성장 실현을 위한 5대 명품 농축산물 육성	․명품농산물 육성 : 5개 품목, 6개 단지, 10농가, 1,000군, 26ha - 5개 품목 : 고추, 토마토, 쌈채류, 배, 벌꿀 * 명품 남동배 수출 : ‘09년 2.6톤 → ’10년 8.3톤 (과테말라)	완료
2	청정개발체제(CDM) 지원 사업 추진	․4개 환경기초시설 탄소중립 프로그램 완료 - 청라, 송도, 가좌, 경서매립 ․‘11년도 4개 환경기초시설에 대한 탄소중립사업 실시(태양광, 태양열, 시설개보수 등)	정상
3	그린에너지 천연가스 자동차 보급	․천연가스 자동차 보급 : 143대(버스 140대, 청소차 3대) ․천연가스 충전소 1개소 확충(220대/일)	정상
4	운행자동차 배출가스 수시 점검 및 저감장치 관리	․운행차 배출가스 수시점검 : 268,911대 ․특정경유차 부착 매연저감장치 성능점검 : 3,047대	정상
5	특정경유차 저공해 관리	․특정경유차 저공해 조치 : 9,432대 - 저감장치 부착 : 5,549대 - LPG엔진 개조 : 2,274대 - 조기 폐차 : 1,609대	정상
6	복합 신․재생에너지 설치사업	․사업기간 : ‘09～’11 ․승기하수처리장의 바이오가스 설비설치 사업으로 공사계약(‘10. 12월) ․‘11. 12월 준공예정 ․국비에 대한 시비매칭분 미확보로 착공시기 지연	지연
7	도시가스 보급 확대	․도시가스 배관연장 : 60,691m ․보급세대 : 29,569세대 ․정압기 4개소 설치	정상
8	생활폐기물 자동집하시설 설치 추진	․사업기간 : ‘07～’12 ․송도 1공구 지동집하시설 준공 ․송도 3공구 자동집하시설 공사중(‘11.10월 준공) ․송도 5․7공구 자동집하시설 착공(‘10.8.13)	정상
9	공공기관 단열개보수	․단열 개보수(단열필름 설치) : 6개소 16,958㎡ - 시본청(민원동, 의회동), 동구, 연수구, 남동구, 계양구, 서구 ․시 청사 시스템 창호 설치공사 완료	정상

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
10	공공기관 에너지이용 합리화 추진	․에너지이용합리화 실시계획 수립(‘10.3월) ․에너지이용합리화 추진실태 점검 : 2회 64개소	정상
11	공공기관 청사 에너지 절감	․3-3-7 공공기관 에너지절감 목표관리제 추진과 중복되어 취소	계획변경 (취소)
12	공공기관 에너지절감 목표관리제 추진	․에너지절감 목표관리제 종합계획 수립(‘10.3월) ․에너지 정밀진단 실시 : 21개 기관(에너지 사용량 100toe 이상 기관) ․에너지사용 실적 점검 : 3회 89개 기관(5%이상 증가 기관)	정상
13	사회복지시설 태양열 급탕설비 설치	․태양열 급탕시설 설치 : 사회복지시설 23개소 집열면적 988㎡	정상
14	그린-홈(태양광․태양열) 지원사업 추진	․그린-홈(태양광, 태양열) 설치완료 : 157가구 - 태양광 105가구, 태양열 52개구	정상
15	사랑의 집 고치기 범 시민 참여 사업	․기업 등 집고치기 참여 : 16개사(단체) ․집고치기 기부금 모금 : 161백만원 ․집고치기 시공 : 521가구 * 많은 기업 및 자원봉사 단체의 참여방안 마련 필요	정상
16	신․재생에너지 시설 확충	․옹진군 공공하수처리장 태양광 발전설비 설치완료 (70kw) ․소래습지생태공원 태양광 발전설비 설치완료 (100kw) ․'11년도에 강화사업소 태양광 발전설비 설치계획 (50kw)	정상
17	태양광 발전설비 시범 설치	․시청사 민원동 옥상에 태양광 발전설비 설치 완료 : 56kw * 태양광 발전설비 운영에 따른 성과조사 및 공공 기관 확대 설치 필요	정상
18	바이오매스 발전사업	․사업기간 : ‘09～’12 ․음폐수 바이오가스(메단가스)화 시설사업(500톤/일) 실시설계 완료 및 착공 ․바이오가스(메탄가스) 자동차 연료화 시설 완료 - 10㎥/min(충전차량 약 60대/일 규모)	정상

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
19	하천재해 예방사업	․선행천 수해상습지 개선사업 행정절차 이행 ․삼동암천 수해상습지 개선사업 행정절차 이행, 보상추진중	정상
20	생태통로 및 녹지축 연결	․사업기간 : ‘07～’13 ․원적산길 생태통로 공사착공(‘10.9.3) ․주안산길 산지연결 아치교 설치에 따른 보상완료 (‘10.11.30) ․승기천변 녹도 준공(‘10.12.29)	정상
21	철새와 함께하는 도심 하천 가꾸기	․인천교, 석남유수지 친수공간조성 타당성 용역 완료 ․남동유수지 친수공간 조성 기본 및 실시설계는 시 재정여건으로 사업비 확보 지연	지연
22	경인 아라뱃길 사업	․경인아라뱃길 건설 : 공정 62% - ‘11. 10월 준공 예정 ․수변 공간 친수경관 조성사업 착수(‘10.6.4)	정상
23	푸른 벗말 조성 (옹진군 북도면)	․그린 체험마을 운영 : 752명 ․마을사무장 1명 채용 ․체험공간조성 보완사업 완료 * ‘11년도 주민교육, 새로운 체험프로그램 개발, 여객운임 지원 등의 예산 미확보로 어려움 예상	완료
24	무의 까지놀섬마을 조성	․조팝나무 등 14종 2,392주 식재 ․호박, 박, 넝쿨터널 조성 : 2동 66㎡ ․체험객 맞이 : 66회 2,166명	정상
25	Green 관광농원 조성	․체험실습관 2개소, 교육관 1개소 설치 - 무기둥 2연동 하우수(992㎡), 온실(향기원) 8연동 하우스(4,320㎡), EM(친환경0 교육관 시설(99㎡) ․넝쿨터널 조성완료 : 100M	정상
26	철새와 함께하는 친수 공간 조성	․율도사업소 수목 갯골유수지에 이식 : 해송외 10종 227주 ․1사 1하천 가꾸기 운동 협약 체결 : 29개사 ․굴포천 갈대, 억새풀, 초화류, 관목류 255,000주 보강식재	완료
27	석모도 수목원 조성사업	․수목원 조성사업 : 공정율 90%(‘11.11월 개장예정) - 토목, 데크로드, 건축, 유리온실 분야 준공 - 조경분야 공사중 * 개장에 따른 진입도로, 주차장 등 철저한 준비 및 점검 필요	정상

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
28	석모도 자연휴양림 조성 사업	․1차, 2차 지구 공사 추진 : 전체 공정율 50% (‘11.11월 개장예정) * 개장에 따른 진입도로, 주차장 등 철저한 준비 및 점검 필요	정상
29	경쟁력 제고를 위한 관광 농촌 개발사업	․사업기간 : ‘07～’14 ․농촌마을 종합개발사업 및 테마공원 조성사업 추진 - 선원권역 기본계획 2단계 승인, 불은권역 시행계획 승인 ․장화지구 주차장 부지 매입 완료	정상
30	저탄소 친환경 녹색어업 육성	․해조류 양식 : 김 양식시설 2개소(1,973책) 준공, 양식장 소독제 및 김 활성제 지원(500드럼) ․친환경 갯벌(굴 등) 양식 및 저질개선 - 굴 양식장 갯닦기 사업 (200ha), 굴양식 시설 (846set) 지원 완료 ․환경개선사업 : 바지락 양식장 저질개선 4개소 (200ha) 준공 ․친환경어장 생태 환경사업 - 양식어장 정화사업 2개소(60ha), 불가사리 수매 267톤 완료	정상
31	그린 경영(기후 홈닥터) 추진	․(주)유니드 등 25개 업체 그린경영 컨설팅 완료	정상

ꏚ 녹색공간 창출 및 저탄소 도시인프라 확충 : 28개 사업

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
1	저탄소 녹색마을 조성 사업	․인천지역 저탄소 녹색마을 조성방안 연구용역 완료(‘10.12월) * 용역 결과에 따른 녹색마을 조성사업 적극 추진 필요	정상
2	하수처리수 재이용 인프라 확대(굴포천 유지용수 공급)	․하수 재이용시설 실시설계 완료 * 굴포하수처리장의 방류수 수질기준 강화로 총인 저감시설이 설치예정임에 따라 예산중복 투자방지를 위해 재검토 (하수재이용시설→방류수 공급)	계획변경 (재검토)
3	공장지역 환경디자인 Eco Friendly Zone 조성	․공장담장 철거․녹화사업 13개소 완료 * 건물 및 옥색 녹화사업과 중복기능으로 ‘11년도 이후 미 시행	정상

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
4	장수천 생태하천 조성	․사업기간 : ‘06～‘13 ․하천기본계획(변경) 용역심의 등 행정절차 이행	정상
5	친환경 에너지 자립형 아시아게임 경기장 건설	․8개 경기장 신재생에너지 의무투자액 5% 기본설계 반영 - 서구 주경기장, 문학수영장, 선학, 십정, 남동, 계양, 송림, 강화 - 지열, 태양광, 태양열, 고효율기기, 우수재활용, 자전거시스템, 자연채광, 쿨튜브, 절수형위생기기	정상
6	인천항 클린포트 조성 사업	․가로정비 4,000m, 담장정비 800m ․녹지조성 : 15,000㎡ ․미관색체디자인 도색 : 3개소	완료
7	깨끗한 인천 앞바다 만들기	․인천 앞바다 쓰레기 수거․처리 : 8,244톤 - 바다쓰레기(침적, 부유, 중층) 처리 : 2,032톤 - 군․구 해안쓰레기 수거사업 : 6,087톤 - 해양정화선 이용 쓰레기 수거처리 : 125 ․해양환경 정화선 운영 : 143일	정상
8	첨단 교통관리시스템 구축	․센터시스템 구축 및 현장시스템 설치 준공(‘10. 7. 27) - 수집․분석시스템 1식 - 현장설비 : 레이져검지기 78대, 가변안내전광판 6기, CCTV 5기, 루프검지기 31개, 통신망 18km	정상
9	수도권 광역버스정보 시스템 구축	․센터시스템 및 장류소 안내기 구축사업 착공 - 정류소 안내기 100개소, 센터 시스템 1식 ․‘11. 2월 준공 예정	정상
10	저탄소 녹색도로 환경 조성	․부평역 역세권 일원 공사중(‘11. 6월 준공예정) ․주안역 일원 설계용역 완료 및 1단계 공사완료 (A=42.9a) * 한전의 한전주 지중화 사업이 조기 완료토록 적극 협의 필요	정상
11	자전거 전용도로 건설	․자전거 이용시설 실시설계(2단계) 용역 완료 ․계양구 1개 노선 1.5km 공사 중(‘11. 3월 준공예정)	정상
12	자전거 타기 및 안전 교육 확대	․문학경기장 임시 자전거교육장 준공 - 교육장 : 가설건물 2층, 연면적 440㎡ - 실외 체험장 및 광장 : 3,280㎡ ․자전거이용 촉진을 위한 리플렛 100,000부 제작․ 배부	완료

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
13	도심형 자전거 보급	․인천시 도심형자전거 보급사업 협약 체결 ․도심형자전거 명칭 선정(미추누리) * 사업예산 축소 등 사업추진 여부 불투명으로 일시 사업 중지에 따른 지연 ․‘11. 3월부터 15,000대 보급예정 (‘10년도분 5,000대, ’11년도분 10,000대)	지연
14	지하철 자전거 탑승시설 설치	․이동로 설치 : 12개소 (23개소 설치 완료) - 귤현, 박촌, 경인교대입구, 작전, 갈산, 부평시장, 부평, 간석오거리, 인천시청, 인천터미널, 선학, 신연수 ․열차내 자전거 휴대탑승 확대실시 (‘10.5.1부터 29개역 전 구간 실시) ․전동차 개조 : 8편성 160량 (1편성당 전동차 맨 앞뒤칸 2량)	정상
15	도심 부설주차장 주차 상한제	․주차상한제 시행방안 연구용역 완료 * ‘12년부터 주차상한제 단계적 추진 계획	정상
16	도심 공영주차장 주차 요금 조정	․주차요금 체계 개선방안 연구용역 완료 - 1급지 지역 : 구월, 부평, 주안, 계양권역 - 조정대상 주차장 : 29개소 ․‘11년 하반기부터 주차급지 조정계획	정상
17	청라～강서간 BRT 구축 사업	․사업기간 : ‘06～’15 ․1단계 실시설계 완료(‘10. 6. 20) 및 공사착수 (‘10. 9. 14)	정상
18	인천도시철도 2호선 건설	․사업기간 : ‘09～’14 ․행정절차 이행 : 사업계획 승인, 도시관리계획 결정 ․현재 공정률 : 19.05%	정상
19	도시형 자기부상열차 건설	․사업기간 : ‘06～’12 ․도시관리계획 결정, 사업계획 승인, 실시설계 승인 ․기공식 (‘10. 8월) ․현재 공정률 : 23%	정상
20	교통유발 시설물 특별 관리	․감면대상시설 실태조사 ․시 조례 개정 홍보 : 안내문 발송 ․체납정리기간 운영	완료

연번	사 업 명	점검․평가 내용(성과)	결과
21	보행자 중심의 Green Parking사업 추진	․부평구 해당 지역주민의 사업추진 미 동의로 사업취소 및 예산삭감 조치 * 보행자 중심의 Green Parking사업은 개인 주택의 담장을 허물고 건물 내에 주차장을 설치하는 사업 으로 반드시 건물주의 사업 참여 동의가 있어야 함.	계획변경 (취소)
22	도시철도 1호선 송도랜드 마크시티 연장 건설공사	․사업기간 : ‘09～’18 ․행정절차 이행 - 입찰안내서 심의 - 교통 및 환경영향평가 용역 착수(‘10. 4. 9) - 기본계획 변경고시(‘10. 9. 29) 등	정상
23	서울지하철 7호선 인천 지역연장 건설공사	․사업기간 : ‘03～’12 ․기본계획 변경고시(사업기간 연장)(‘10. 9. 27) ․궤도공사 착수(‘10. 12. 30) ․현재 공정률 : 82%	정상
24	도시철도 친환경 신재생 에너지 시스템 구축	․사업기간 : ‘09～’14 ․실시설계 완료(‘10.3.31)	정상
25	강화 조력발전소 공동 개발사업	․사업기간 : ‘07～’17 ․환경단체, 어민대책위원회에서 본 타당성조사 및 사전환경성검토의 검증 필요성 제기되어 민간검증위원회를 구성하여 강화갯벌 및 환경에 미치는 영향에 대한 전반적인 문제점 재검토	계획변경 (재검토)
26	무의도 해상풍력발전 단지 공동개발	․사업기간 : ‘08～’16 ․‘10. 1월 무의도 풍속측정 완료 ․‘10. 3월 무의도 예비타당성 조사 완료 ․‘10. 12월 대초지도 풍속측정 완료 조사 완료 ․‘13년 착공, ’16년 준공예정	정상
27	덕적도 조류발전단지 공동개발	․사업기간 : ‘09～’16 ․조류자원 기초조사 완료(‘10. 9) ․‘15년 착공, ‘16년 준공예정	정상
28	해양바이오 에너지 개발	․사업기간 : ‘09～’18 ․바이오에너지(디젤, 에칸올) 생산기술 개발 착수 ․바이오디젤 생산용 광생물기 설치(강화대교 하류 해수면)	정상

Ⅴ		향후계획

ꏚ 향후 계획

❍ 2010년도 중점 추진과제는 지자체의 조례제정 및 녹색성장위원회 기능 활성화 등 지자체의 제도적 도입의 시기였음

❍ 2010. 11월에 조례가 공포되어 2011. 5월에 제1회 녹색성장위원회를 개최하였고, 녹색성장 기본법의 제정 취지에 맞도록 녹색성장위원회 운영 활동을 강화해 나갈 계획임

❍ 또한, 향후 군․구의 녹색성장 조례 제정 등 제도적 정비를 할 수 있도록 권장․독려할 계획임

※ 붙임자료

❍ 2010년 녹색성장 추진상황 단위사업별 점점․평가 결과 총괄

및 2010년 단위사업별 점검․평가표

2010년 녹색성장 추진상황 점검·평가 결과 총괄

1. 26개 과제                                                                              (단위:백만원,건)

관 리 번 호		사 업 명	사업비 집행				계획변경			추 진 결 과			추진부서	쪽
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료		정상	지연/ 미흡
계			1,837,848	1,997,798.4	1,696,595.5	92.3	2	3	17		68	5
1. 녹색성장 기반구축 및 녹색생활 혁명			5,465	5,509.4	5,277.5	96.6		1	7		16	2
1-1. 법제도적 추진체계 마련			9	7.4	3	33.3			3			2
1-1-1	녹색기반	저탄소 녹색성장 기본조례 제정	비예산						○				정책기획관실	29
1-1-2	녹색기반	녹색성장위원회 구성 및 운영	4	2.4		0.0						○	정책기획관실	30
1-1-3	녹색기반	녹색성장 세부실행계획 수립 및 신규사업 발굴	5	5	3	60.0			○				정책기획관실	31
1-1-4	녹색기반	친환경 에너지 관련 제도 정비	비예산									○	신성장동력과	32
1-1-5	녹색기반	기후변화 대응관련 제도 정비	비예산						○				환경정책과	33
1-2. 녹색정책추진 및 녹색시장 활성화 여건조성			300	529	473	157.7		1			3
1-2-1	녹색기반	녹색재단(가칭) 설립 추진	비예산					○					환경정책과	34
1-2-2	녹색공간	나무은행 운영	100	329	273	273.0					○		공원녹지과	35
1-2-3	녹색생활	탄소배출권 거래 시범사업	200	200	200	100.0					○		환경정책과	36
1-2-4	녹색교통	인천도시철도 2호선 청정 개발체제 (CDM) 사업	비예산								○		도시철도건설본부	37

관 리 번 호		사 업 명	사업비 집행				계획변경		추 진 결 과			추진부서
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료	정상	지연/ 미흡
1-3. 녹색생활 혁명을 통한 지속가능사회 실현			2,791	2,627	2,573.5	92.2			2	11
1-3-1	녹색일자리	건강하고 활력 있는 환경단체 육성	1,000	786	786	78.6				○		환경정책과	38
1-3-2	녹색생활	기후변화 전문강사 순회교육	35	51	41	117.1				○		환경정책과	39
1-3-3	녹색생활	산업계 기후변화대응 상설 기후 학교 운영	비예산							○		환경정책과	40
1-3-4	녹색기반	공공기관 등 에너지 담당자 직무 능력 배양	10	15	14	140.0			○			신성장동력과	41
1-3-5	녹색생활	저탄소 녹색통장 갖기 운동 (탄소포인트) 추진	200	216	216	108.0				○		환경정책과	42
1-3-6	녹색생활	탄소발자국 우수아파트 운영	50	50	50	100.0				○		환경정책과	43
1-3-7	녹색생활	탄소-포인트 제도 시행	100	100	81.5	81.5				○		신성장동력과	44
1-3-8	녹색생활	그린스타트 인천네트워크 실천운동 확산	180	180	180	100.0				○		환경정책과	55
1-3-9	녹색생활	에너지 절약 및 효율화 실천 홍보	32	109	109	340.6				○		신성장동력과	46
1-3-10	녹색생활	Green Food 운동	50	70	68	136.0				○		위생정책과	47
1-3-11	녹색생활	탄소발자국 모니터링	비예산							○		환경정책과	48
1-3-12	녹색건축물	공공기관 LED 조명기기 보급	1,084	1,000	978	90.2				○		신성장동력과	49
1-3-13	녹색기반	친환경 녹색도시 성장을 위한 창조적인 인재양성	50	50	50	100.0			○			인재개발원	50

관 리 번 호		사 업 명	사업비 집행				계획변경		추 진 결 과			추진부서	쪽
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료	정상	지연/ 미흡
1-4. 그린인천 마케팅 및 그린 리더쉽 제고			2,365	2,346	2,228	94.2			2	2
1-4-1	녹색기반	글로벌 3대 물 포럼 육성	400	400	400	100.0				○		물관리과	51
1-4-2	녹색기반	ICLEI 세계환경회의 개최 추진	1,156	1,092	974	84.3			○			환경정책과	52
1-4-3	녹색기반	EAAF 파트너십 사무국 협력체계구축	509	509	509	100.0				○		환경정책과	53
1-4-4	녹색생활	녹색구매로 저탄소 사회 조성	300	345	345	115.0			○			환경정책과	54

2. 10개 과제                                                                             (단위:백만원,건)

관 리 번 호		사 업 명	사업비 집행				계획변경		추 진 결 과			추진부서	쪽
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료	정상	지연/ 미흡
2. 기후변화 대응 및 적응			110,884	204,547	199,862	180.2			5	5
2-1. 온실가스 감축			6,420	5,669	5,522	86.0			2	1
2-1-1	녹색기반	기후변화 종합대책 수립	이월사업						○			환경정책과	55
2-1-2	녹색기반	Low Carbon IFEZ 30 추진	350	294	147	42.0				○		경제자유구역청	56
2-1-3	녹색건축물	인천국제공항 온실가스 감축	6,070	5,375	5,375	88.6			○			항만공항정책과	57
2-2. 온실가스 정보관리 및 정책 지원체계 대책			120	120	120	100.0				1
2-2-1	녹색기반	온실가스 인벤토리 구축	120	120	120	100.0				○		환경정책과	58
2-3. 기후변화 영향평가 및 적응대책			444	444	444	100.0			1
2-3-1	녹색기반	온실가스 발생 모니터링 및 식물·수목 온실가스 감축능력 실태조사	444	444	444	100.0			○			보건환경연구원	59
2-4. 지역특성에 맞는 탄소흡수원 확충			92,400	186,994	186,951	202.3				2
2-4-1	녹색건축물	건물 및 옥상녹화 사업	500	594	551	110.2				○		공원녹지과	60
2-4-2	녹색공간	도심속 생명의 숲 1천만㎡ 늘리기	91,900	186,400	186,400	191.9				○		공원녹지과	61
2-5. 기후변화의 시민공감대 형성과 정보공유			11,500	11,320	6,825	59.3			2	1
2-5-1	녹색기반	기후변화 정보공유	비예산						○			환경정책과	62
2-5-2	녹색기반	그린 통합데이터센터(IDC) 구축	11,500	11,320	6,825	59.3				○		정보화담당관실	63
2-5-3	녹색생활	종이없는 녹색 세정정보화 추진	비예산						○			세정과	64

3. 31개 과제                                                                             (단위:백만원,건)

관 리 번 호		사 업 명	사업비 집행				계획변경		추 진 결 과			추진부서	쪽
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료	정상	지연/미흡
3. 녹색기술개발 및 녹색산업 육성			923,489	908,730	782,424	84.7	1		2	26	2
3-1. 녹색사업 아이템 발굴 및 녹색상품 개발			500	500	500	100.0				1
3-1-1	녹색일자리	녹색성장 실현을 위한 5대 명품 농축산물 육성	500	500	500	100.0%				○		농업기술센터	65
3-2. 환경․신재생에너지 등 녹색기술 개발지원			34,715	27,465	27,363	78.8				4
3-2-1	녹색기반	청정개발체제(CDM) 지원사업 추진	50	50	50	100.0				○		환경정책과	66
3-2-2	녹색교통	그린에너지 천연가스 자동차 보급	4,608	2,364	2,265	49.2				○		신성장동력과	67
3-2-3	녹색교통	운행자동차 배출가스 수시점검 및저감장치 관리	57	52	49	86.0				○		환경정책과	68
3-2-4	녹색교통	특정경유차 저공해 관리	30,000	24,999	24,999	83.3				○		환경정책과	69
3-3. 에너지효율 및 자급률 제고			83,082	71,478	68,306	82.2	1			11	1
3-3-1	녹색일자리	복합 신·재생에너지 설치사업	1,200	700	700	58.3					○	신성장동력과	70
3-3-2	녹색건축물	도시가스 보급 확대	17,884	17,884	17,884	100.0				○		신성장동력과	71
3-3-3	녹색건축물	생활폐기물 자동집하시설 설치 추진	53,381	31,300	28,700	53.8				○		경제자유구역청	72
3-3-4	녹색건축물	공공기관 단열 개·보수	1,250	890	856	68.5				○		신성장동력과	73
3-3-5	녹색건축물	공공기관 에너지이용합리화 추진	3							○		신성장동력과	74

관 리 번 호		사 업 명	사업비 집행				계획변경		추 진 결 과			추진부서	쪽
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료	정상	지연/미흡
3-3-6	녹색건축물	공공기관 청사 에너지 절감	200				○					신성장동력과	75
3-3-7	녹색건축물	공공기관 에너지절감 목표관리제 추진	200	200	154	77.0				○		신성장동력과	76
3-3-8	녹색건축물	사회복지시설 태양열 급탕설비 설치	910	910	747	82.1				○		신성장동력과	77
3-3-9	녹색건축물	그린-홈(태양광, 태양열) 지원사업추진	400	400	375	93.8				○		신성장동력과	78
3-3-10	녹색건축물	사랑의 집 고치기 범시민 참여사업	비예산	500	500					○		사회복지봉사과	79
3-3-11	녹색건축물	신·재생에너지 시설 확충	1,899	1,899	1,670	87.9				○		신성장동력과	80
3-3-12	녹색건축물	태양광 발전 시범사업 설치	500	500	425	85.0				○		신성장동력과	81
3-3-13	녹색건축물	바이오매스 발전사업	5,255	16,295	16,295	310.1				○		자원순환과	82
3-4. 녹색뉴딜사업 추진을 통한 녹색일자리 확대			790,251	790,682	667,657	84.5				3	1
3-4-1	녹색공간	하천재해 예방사업	7,500	8,000	6,016	80.2				○		물관리과	84
3-4-2	녹색공간	생태통로 및 녹지축 연결	4,051	4,500	3,459	85.4				○		환경정책과	85
3-4-3	녹색공간	철새와 함께하는 도심하천 가꾸기	1,100	582	82	7.5					○	물관리과	86
3-4-4	녹색공간	경인 아라뱃길 사업	777,600	777,600	658,100	84.6				○		항만공항시설과	87

관 리 번 호		사 업 명	사업비 집행				계획변경		추 진 결 과			추진부서	쪽
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료	정상	지연/미흡
3-5. 고부가가치 생태관광 활성화			14,891	18,555	18,548	124.6			2	6
3-5-1	녹색공간	푸른 벗말 조성	37	238	238	643.2			○			옹진군	88
3-5-2	녹색공간	무의도 까치놀섬마을 조성	21	21	14	66.7				○		농업기술센터	89
3-5-3	녹색공간	Green 시민 관광농원 조성	333	346	346	103.9				○		농업기술센터	90
3-5-4	녹색공간	철새와 함께하는 친수공간 조성	3,400	3,400	3,400	100.0			○			물관리과	91
3-5-5	녹색공간	석모도 수목원 조성사업	1,900	1,900	1,900	100.0				○		강화군	92
3-5-6	녹색공간	석모도 자연휴양림 조성사업	1,980	5,430	5,430	274.2				○		강화군	93
3-5-7	녹색공간	경쟁력 제고를 위한 관광농촌 개발사업	4,001	4,001	4,001	100.0				○		농식품유통과	94
3-5-8	녹색공간	저탄소 친환경 녹색어업 육성	3,219	3,219	3,219	100.0				○		해양수산과	95
3-6. 녹색성장 연구개발과 그린경영 컨설팅			50	50	50	100.0				1
3-6-1	녹색건축물	그린 경영(기후 홈 닥터) 추진	50	50	50	100.0				○		환경정책과	96

4. 28개 과제                                                                             (단위:백만원,건)

관 리 번 호		사 업 명	사업비 집행				계획변경		추 진 결 과			추진부서	쪽
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료	정상	지연/미흡
4. 녹색공간 및 저탄소 도시인프라 확충			798,010	879,012	709,032	88.9	1	2	3	21	1
4-1. 저탄소 녹색도시 전환 위한 도시구조 창안			2,095	1,156	454	21.7		1		1
4-1-1	녹색공간	저탄소 녹색마을 조성사업	60	100	100	166.7				○		환경정책과	97
4-1-2	녹색기반	하수처리수 재이용 인프라 확대 (굴포천 유지용수 공급))	2,035	1,056	354	17.4		○				물관리과	98
4-2. 친환경 건축 등 저비용 도시건설 및 재생			396,682	510,750	398,648	100.5			1	4
4-2-1	녹색공간	공장지역 환경디자인 Eco FriendlyZ0ne 조성	714	754	754	105.6				○		대기보전과	99
4-2-2	녹색공간	장수천 생태하천 조성	1,000	500		0.0				○		물관리과	100
4-2-3	녹색건축물	친환경 에너지자립형 아시안게임경기장 건설	386,033	499,933	388,344	100.6				○		경기장조성과	101
4-2-4	녹색공간	인천항 클린포트 조성사업	900	900	900	100.1			○			항만공항정책과	102
4-2-5	녹색공간	깨긋한 인천 앞바다 만들기	8,035	8,663	8,650	107.7				○		해양수산과	103
4-3. 친환경 교통 및 물류 인프라 조성			5,300	9,370	6,422	121.2				3
4-3-1	녹색교통	첨단 교통관리시스템 구축	이월사업	4,000	4,000					○		교통기획과	104
4-3-2	녹색교통	수도권 광역버스정보시스템 구축	1,500	1,500	1,000	66.7				○		교통기획과	105
4-3-3	녹색교통	저탄소 녹색도로 환경조성	3,800	3,870	1,422	37.4				○		도로과	106
4-4. 대중교통 및 자전거 중심도시 실현			381,733	1,360	1,360	0.35	1		2	10	1
4-4-1	녹색교통	자전거 전용도로 건설	7,250	1,350	1,350	18.6				○		도로과	107
4-4-2	녹색교통	자전거 타기 및 안전교육 확대	600	10	10	1.7			○			도로과	108

관리번호		사 업 명	사업비 집행				계획변경		추 진 결 과			추진부서	쪽
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료	정상	지연/미흡
4-4-3	녹색교통	도심형 자전거 보급	3,000	500							○	도로과	109
4-4-4	녹색교통	지하철 자전거 탑승시설 설치	250	250	250	100.0				○		도로과	110
4-4-5	녹색교통	도심 부설주차장 주차상한제	이월사업							○		교통관리과	111
4-4-6	녹색교통	도심 공영주차장 주차요금 조정	이월사업							○		교통관리과	112
4-4-7	녹색교통	청라∼강서간 BRT 구축사업	9,860	7,956	7,956	80.7				○		교통기획과	113
4-4-8	녹색교통	인천 도시철도 2호선 건립	212,000	163,000	151,509	71.5				○		도시철도건설본부	114
4-4-9	녹색교통	도시형 자기부상열차 건설	96,100	93,400	93,400	97.2				○		대중교통과	115
4-4-10	녹색교통	교통유발 시설물 특별관리	비예산						○			교통기획과	116
4-4-11	녹색교통	보행자 중심의 Green Parking 사업추진	1,006				○						117
4-4-12	녹색교통	도시철도 1호선 송도랜드마크시티 연장 건설공사	1,667	31,700	289	17.3				○		도시철도건설본부	118
4-4-13	녹색교통	서울지하철 7호선 인천지역연장 건설공사	50,000	57,240	46,414	92.8				○		도시철도건설본부	119
4-4-14	녹색교통	도시철도 친환경 신재생에너지 시스템 구축	이월사업							○			120

관리번호		사 업 명	사업비 집행				계획변경		추 진 결 과			추진부서	쪽
			예산계획	예산액	집행액	집행률 (%)	취소	재검토	완료	정상	지연/미흡
4-5. 신․재생 에너지 발전기지 확충			12,200	2,330	2,330	19.1		1		3
4-5-1	녹색일자리	강화 조력발전소 공동개발사업	이월사업					○				신성장동력과	121
4-5-2	녹색일자리	무의도 해상풍력발전단지 공동개발	600	130	130	21.7				○		신성장동력과	122
4-5-3	녹색일자리	덕적도 조류발전단지 공동개발	10,000	600	600	6.0				○		신성장동력과	123
4-5-4	녹색일자리	해양 바이오에너지 개발	1,600	1,600	1,600	100.0				○		신성장동력과	124

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 1 - 1		구 분	녹색기반			추진부서		광역기획담당관실
사 업 명		저탄소 녹색성장 기본조례 제정
추진개요		❍ 제정 주요내용 - 녹색성장 추진계획수립 - 녹색성장 추진상황 점검․평가 - 녹색성장위원회 구성․운영 등 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ ‘10. 4. 15 : 조례(안) 제정방침 결정 ❍ ‘10. 5. 27 : 조례규칙심의회 의결(원안가결) ❍ ‘10. 10. 29 : 제188회 시의회 임시회 원안가결 ❍ ‘10. 11. 15 : 조례 제정 공포․시행
향후계획		❍ 조례의 규정에 따라 운영
성과	목표	❍ 인천광역시 저탄소 녹색성장 기본조례 제정
	성과	❍ 저탄소 녹색성장 기본 조례 제정 및 시행(‘10. 11. 15)
	기대 효과	❍ 우리시 특성에 맞는 저탄소 녹색성장 사업을 효과적으로 추진할 수 있는 제도적인 추진체계 마련
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 조례제정 시기가 행정여건으로 인하여 당초(2분기)대비 다소 지연된 점은 있으나, 정상적으로 조례 제정 완료

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 1 - 2		구 분		녹색기반		추진부서		광역기획담당관실
사 업 명		녹색성장위원회 구성 및 운영
추진개요		❍ 근 거 : 저탄소 녹색성장 기본법 제20조 및 조례 제8조 ❍ 구 성 : 32명(당연직 11, 위촉직 21), 4개 분과 ❍ 기 능 : 심의․자문기구 ❍ 운 영 : 정례회 2회, 임시회(수시) ❍ 사 업 비 : 2.4백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘09. 7. 28 : 녹색성장위원회 구성계획 수립 - ‘10. 11. 15 : 저탄소 녹색성장 기본조례 제정 ❍ 집 행 액 : 미집행 (위원회 미 개최)
향후계획		❍ ‘11. 5월 : 녹색성장위원회 재구성 및 위원회 개최 - 위촉장 수여, 녹색성장 추진상황 결과보고 등 안건심의 ❍ ‘11. 6 ～ 12월 : 위원회 정기 및 수시 개최
성과	목표	❍ 녹색성장위원회 재 구성(위촉장 수여) ❍ 녹색성장위원회 운영 (1회)
	성과	❍ 위원회 미 운영 ※ ‘09. 7. 28 녹색성장위원회 구성계획 수립 ※ ‘10. 11. 15 저탄소 녹색성장 기본조례 제정을 통한 위원회 구성․운영 근거 마련
	기대 효과	❍ 녹색성장 추진계획 수립, 추진상황 점검 등 심의를 통해 체계적인 녹색성장사업 추진
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소		〇 재검토		〇 완료		〇 정상		● 지연/미흡
평가결과		❍ 행안부의 지침에 따라 위원회 구성계획을 수립하였으나 운영 근거인 조례가 제정되지 않아 미 개최/ ❍ 조례가 ‘10. 11. 15 제정됨에 따라 시간적으로 위원회 재구성 및 운영 지연

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 1 - 3		구 분	녹색기반		추진부서		정책기획관실
사 업 명		녹색성장 세부실행계획 수립 및 신규사업 발굴
추진개요		❍ 기 간 : 3월, 수시 ❍ 주요내용 - 2010년도 녹색성장 세부시행계획 수립 - 2010년 녹색성장 세부시행계획 추진상황 점검․평가 - 녹색성장 우수사례 발굴․전파 ❍ 사 업 비 : 5백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘09. 12. 1 : 녹색성장 5개년 계획 수립 - ‘10. 3. 26 : 2010년도 녹색성장 세부시행계획 수립 - ‘10. 7. 22 : 2010년도 상반기 녹색성장 추진상황 점검 및 우수사례 24건 발굴 (행안부 보고) - ‘10. 12. 23 : 2010년도 녹색성장 추진상황 점검․평가계획 수립 및 자료제출 요구 ❍ 집 행 액 : 3백만원(관련법 제정으로 법령집 제작)
향후계획		❍ ‘11. 1월 : 2010년도 녹색성장 추진상황 점검․평가 ❍ ‘11. 2월 : 시의회 및 중앙 녹색성장위원회 보고
성과	목표	❍ 2010년도 녹색성장 세부시행계획 수립 ❍ 세부시행계획 추진상황 점검․평가 ❍ 녹색성장 우수사례 발굴․전파
	성과	❍ ‘10년 세부시행계획 수립 : 4개 분야 95개 사업 ❍ 상반기 추진상황 점검 완료 : 완료 3, 정상 81, 지연 9, 일몰 2 ❍ 우수사례 24건 발굴 ※ 녹색경쟁력 지표 평가에서 우수단체로 선정(행안부장관 표창)
	기대효과	❍ 녹색성장 5개년 계획의 단위사업별 추진상황 중점관리로 녹색성장 추진에 대한 실효성 제고
결 과			계 획 변 경			추 진 결 과
			〇 취소		〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 녹색성장 추진 계획에 따라 정상적으로 이행 ❍ 우리시 특색에 맞는 우수사례를 발굴이 다소 미흡, 적극적인 사례 발굴 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 1 - 4		구 분		녹색기반		추진부서		신성장동력과
사 업 명		친환경 에너지 관련 제도 정비
추진개요		❍ 사업내용 - 저탄소 녹색성장 기본법 시행관련 에너지기본조례 정비 - 친환경․에너지 건축기준에 관한 세부규정 마련 및 조례 정비 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ ‘10. 3～12월 : 친환경․에너지 건축기준에 관한 조례 시행관련 자료수집
향후계획		❍ 조례정비(에너지 기본조례, 친환경․에너지 건축기준에 관한 조례) ❍ 친환경․에너지 건축기준에 관한 세부규정 마련
성과	목표	❍ 에너지 기본조례 및 친환경․에너지 건축기준에 관한 조례 정비 ❍ 친환경․에너지 건축기준에 관한 세부규정 마련
	성과	❍ 조례 개정관련 자료수집 빛 검토
	기대 효과	❍ 기후변화 대응을 위한 제도정비로 효율적인 에너지정책 추진
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소		〇 재검토		〇 완료		〇 정상		● 지연/미흡
평가결과		❍ 에너지 기본조례 및 친환경․에너지 건축기준에 관한 조례 개정을 위한 자료수집 등 정상적으로 추진중에 있음 ❍ 저탄소 녹색성장 기본조례와 관련된 사항을 충분히 검토한 후 개정 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 1 - 5		구 분	녹색기반			추진부서		환경정책과
사 업 명		기후변화 대응관련 제도 정비
추진개요		❍ 사업내용 - 기후변화대응 조례 공포 - 기후변화대응 종합계획 수립 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ ‘10. 1. 18 : 기후변화대응 조례 제정․공포 ❍ ‘10. 3월 : 기후변화대응 종합계획 수립
향후계획		❍ 기후변화대응 조례 개정 - 저탄소 녹색성장 기본조례상의 녹색성장위원회와 기후변화대응 조례상의 기후변화대책위원회와의 기능 중복에 따른 개정
성과	목표	❍ 기후변화대응 조례 공포․시행 ❍ 기후변화대응 종합계획 수립
	성과	❍ ‘10. 1. 18 기후변화대응 조례 제정․시행 ❍ ’10. 3월 기후변화대응 종합계획 수립완료
	기대 효과	❍ 산업 및 사회 각 분야에 걸쳐 온실가스 저감활동을 촉진할 수 있는 법률적 근거와 기반 마련
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇 지연/미흡
평가결과		❍ 기후변화대응 조례 제정 및 종합계획 수립을 정상적으로 완료 ❍ 녹색성장위원회와 기후변화대책위원회간의 기능중복에 대하여는 충분히 통․폐합 여부를 검토 후 조례 개정 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 2 - 1		구 분		녹색기반		추진부서		환경정책과
사 업 명		녹색재단(가칭) 설립 추진
추진개요		❍ 사업개요 - 조 직 : 3개팀 15명(경영관리팀, 사업팀, 교육홍보팀) - 운영방법 ․민간중심의 비영리 공익 재단법인 ․재원은 외부(개발이익금, 기부금) 충당원칙 ․민․관 협력 시스템에 의한 재단중심의 독립적 운영 - 주요사업 ․저탄소 녹색성장 시민 실천운동 전개 ․시민친환적 수변 및 녹지조성 관리 ․기후변화대응 교육 및 국제협력활동 지원 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ 녹색재단 설립 검토
향후계획		❍ 녹색재단 설립에 따른 공론화, 재원확보 방안, 지원근거 조례 제정 등 준비
성과	목표	❍ 창립 준비위원회 구성 및 운영
	성과	❍ 녹색재단 설립 검토
	기대 효과	❍ 시민중심의 재단을 통해 자발적으로 녹색성장 실천운동에 참여하는 기반 마련
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소		● 재검토		〇 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 녹색재단 설립에는 막대한 외부재원(개발이익금, 기부금)이 필요하나 지역경제 및 시의 재정여건이 열악하여 재검토 ❍ 재원 확보방안 등을 구체적으로 강구하여 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 2 - 2		구 분		녹색공간		추진부서		공원녹지과
사 업 명		나무은행 운영
추진개요		❍ 사업내용 - 기 간 : 연중 지속 운영 - 운영개소 : 16개소 207,617㎡ - 수목현황 : 느티나무 등 103,946 주 - 운영내용 : 각종 개발사업으로 발생하는 수목과 시민기증 수목을 선별하여 보존 및 재활용 ❍ 사 업 비 : 329백만원(시 100, 군구 229)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3. 22 ～ 3. 30 : 나무은행 운영상황 일제점검 - ‘10. 4. 12 : 2010년 나무은행 운영계획 수립 및 시달 - ‘10. 6. 30 : 소나무 등 3,182주 수목 보존 및 재활용 - ‘10. 12. 28 : 은행나무 등 1,547주 수목 보존 및 재활용 ❍ 집 행 액 : 273백만원
향후계획		❍ 지장수목․기증수목 연중 상시접수 및 재활용
성과	목표	❍ 수목 보존 및 재활용 : 358주
	성과	❍ 수목 보존 및 재활용 : 소나무, 은행나무 등 4,729주 ※ 목표대비 1,320% 달성
	기대효과	❍ 소중한 수목자원 보존 및 식재(재활용)를 통한 도심내 녹지율 증대
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소		〇 재검토		〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 수목 보존 및 재활용을 계획이상으로 추진 ❍ 지속적으로 훼손위기 수목자원의 보전과 식재를 통해 녹지율 증대 추진 ❍ 수목의 보관 공간 부족은 유휴부지 등 부지확보 노력 지속 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 2 - 3		구 분	녹색생활			추진부서		환경정책과
사 업 명		탄소배출권 거래 시범사업
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 30개 공공기관 - 항목 : 전력, 난방, 공용차량 유류사용량, 열(스팀) - 내용 : 배출권 사이버 기상거래 실시 ❍ 사 업 비 : 200백만원(국 100, 시 100)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1 ～ 12월 : 온실가스 감축이행 - ‘10. 12월 : 배출권 거래 시행 ․495톤, 13,264천원 사이버 가상거래 - ‘10. 12월 : 우수기관 인센티브 지급 (200백만원) ❍ 집 행 액 : 200백만원
향후계획		❍ 탄소배출권 거래 시범사업 지속 추진
성과	목표	❍ 탄소배출권 사이버 거래
	성과	❍ 탄소배출권 거래 시범사업 30개 공공기관 참여 - 거래량 : 495톤, 13,264천원 (사이버 가상거래)
	기대효과	❍ 실제 탄소배출권 거래 대비 사전 적응능력 배양 ❍ 공공기관 온실가스 감축 선도적 역할 수행 및 기후변화대응 기반구축
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 실제 탄소배출권 거래를 대비하여 공공기관의 시범사업을 계획대로 정상 추진 ❍ 앞으로도 많은 공공기관들이 탄소배출권 거래 사업에 선도적 역할을 할 수 있도록 지속․확대추진 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 2 - 4		구 분	녹색교통			추진부서		도시철도건설본부
사 업 명		인천도시철도 2호선 청정개발체제(CDM) 사업
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘10 ～ ’15년 - CO2 예상 절감량 : 약 11만톤/년간 ❍ 사 업 비 : 성공불제
추진실적		❍ ‘10. 2. 9 : CDM사업 PM대상사업 신정 및 선정 ❍ ‘10. 5. 26 : CDM사업 제안서 평가위원회 개최 - 우선 협상자 선정(사우스퍼시픽사 & 스위스 그루터사) ❍ ‘10. 8. 25 : CDM사업 협약서 체결 ❍ ‘10. 9. 16 : CDM사업 과업착수 ❍ ‘10.12. 7 : CDM사업 추진사항 제출(본부→UNFCCC)
향후계획		❍ '11. 6. 30 : CDM사업 승인서 발급요청(본부→국가CDM 승인기구) ❍ '11. 12. 30 : CDM사업 등록(UNFCCC) - CDM사업 등록(UNFCCC)을 하여야 탄소배출권 선물거래 가능 ❍ ‘15. 12. 30 : CERS 획득 - 인증된 탄소배출권(CERS) → 판매 → 인천시에 입금
성과	목표	❍ CDM사업자 선정을 위한 제안서 평가, 사업자 선정 및 협약서 체결
	성과	❍ CDM사업의 본격적인 추진을 위한 사업자 선정 및 과업착수 - 사업자 : (주)사우스퍼시픽사 & 스위스 그루터사
	기대효과	❍ 기후변화협약에 효과적 대응 ❍ 탄소배출권 판매로 인한 경제적 수익 창출 - 년 판매수익 : 19.6억원/년(‘10. 12. 27 기준)
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 탄소배출권 거래제를 대비하여 도시철도 사업에 CDM사업을 도입한 것으로 계획대로 정상 추진 ❍ 앞으로도 많은 국가, 지방정부에서 경쟁적으로 탄소배출권 거래 사업을 시행할 것으로 보임. 실효성 있는 성과가 발생할 수 있도록 적극 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 1		구 분	녹색일자리			추진부서		환경정책과
사 업 명		건강하고 활력 있는 환경단체 육성
추진개요		❍ 사업내용 - 인천의제21 실천협의회 지원 - 민간단체 사업지원 ․체험환경교육프로그램 지원 : 3개 단체 지원 ․환경보전 기념행사 지원 : 자구의 날, 환경의 날 등 - 인천지역 환경기술개발센터 지원 - 알레르기 환경성질환 연구센터 지원 ❍ 사 업 비 : 786백만원(국 16, 시 770)
추진실적		❍ 시비보조 사업비 지원 - 인천의제21실천협의회, 인하대병원 환경보건센터, 인천지역 환경기술개발센터, 체험환경교육프로그램(3개 단체) 지구의 날 행사, 환경의 날 행사 ❍ 집 행 액 : 786백만원
향후계획		❍ 환경단체 육성을 위한 보조금 지속 지원
성과	목표	❍ 환경단체 보조금 지원 : 5개 분야 8개 단체
	성과	❍ 환경단체 보조금 5개 분야, 8개 단체, 786백만원 지원
	기대효과	❍ 시민․전문가와 연계한 공감대 형성으로 기후변화대응 등 환경정책 유연성 제고 ❍ 환경개선 등 녹색성장 추진에 시민 자율참여 분위기 확산
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 환경단체 육성을 위한 지원을 계획대로 정상 추진 ❍ 앞으로 많은 환경단체(시민)가 기후변화대응, 환경보전 등 녹색성장 사업에 자율적으로 참여하여 공감대를 형성할 수 있도록 적극적인 관리가 필요함

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 2		구 분	녹색생활			추진부서		환경정책과
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 시민, 유치원, 초․중․고등학교 학생 - 방법 : 선착순 신청학교 방문교육 실시 - 내용 : 기후변화 영향, 기후변화 대응, 온실가스 줄이기 실천사항 등 소개 ❍ 사 업 비 : 51백만원(국 20, 시 31)
추진실적		❍ 추진실적 - 기후변화 전문강사 워크숍 : 4회 - 순화교육 실시 : 시민․학생대상 885회 38,000명 - 순회교육 모니터링 25회 및 강사 소양강화 워크숍 실시 ❍ 집 행 액 : 41백만원(잔액 ‘11년 1월중 강사수당 지급예정)
향후계획		❍ 기후변화에 대한 시민과 학생들의 이해와 공감대 형성을 위해 순회교육 지속 실시
성과	목표	❍ 순회교육 : 300회
	성과	❍ 시민․학생대상 순회교육 : 885회 38,000명
	기대효과	❍ 시민 및 어린이․학생들에게 기후변화에 대한 교육으로 저탄소 생활실천 자율적 참여 유도
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 기후변화에 대한 이해와 공감대 형성을 위하여 당초 목표이상으로 순회교육 실시 ❍ 앞으로도 많은 시민, 어린이․학생들에게 가정 및 학교에서 온실가스 줄이기 녹색생활 실천 정착을 위하여 지속적인 교육실시 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 3		구 분	녹색생활			추진부서		환경정책과
사 업 명		산업계 기후변화 대응 상설 기후학교 운영
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 기업 실무자, 환경오염방지시설업체, 환경관리인 등 - 방법 : 인천상공회의소 환경관련 교육시 기후변화 과목 교육 - 내용 : 기후변화 대응을 위한 기업인의 자세 및 대응사례 등 ❍ 사 업 비 : 비 예산 (인천상공회의소 자체사업비 활용)
추진실적		❍ ‘10. 3 ～ 12월 : 기후학교 운영 (9회 1,500명)
향후계획		❍ 기후변화대응 상설 기후학교 지속 추진
성과	목표	❍ 기후학교 운영 : 8회
	성과	❍ 기후학교 운영(교육) : 9회 1,500명
	기대효과	❍ 기업 및 환경관련 관계자가 직장 등 일상생활에서 기후변화에 대한 대응능력 제고 ❍ 기후변화 대응을 위한 기업인 의식 제고 및 대응경영 확산 유도
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 기후변화 의식, 대응능력, 대응 경영 등을 위한 강의를 당초 목표이상으로 실시 ❍ 앞으로도 기후변화 대응을 위하여 기업인 및 관련관계자들이 대응능력을 제고할 수 있도록 지속적인 교육 실시 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 4		구 분	녹색기반			추진부서		신성장동력과
사 업 명		공공기관 등 에너지 담당자 직무능력 배양
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 에너지 담당자(시, 군․구, 공사․공단) - 내용 : 전문기관 위탁교육, 선진지 견학, 목표관리제 담당자 직무교육, 워크숍 개최 ❍ 사 업 비 : 15백만원 (국비)
추진실적		❍ 추진실적 - 2010. 1월 : 2010년도 에너지․기후변화 정책 종합설명회 (150명) - 2010. 3월 : 공무원 및 유관기관 에너지 담당자 워크숍 (41명) - 2010. 3월 : 공공기관 에너지절감 목표관리제 교육 (35명) - 2010. 6월 : 에너지 담당자 전문기관 위탁교육 (2명) - 2010. 6월 : 에너지 전문 강사 선진지 견학 - 2010. 6월 : 에너지 담당공무원 해외연수 (1명, 일본) - 2010. 7월 : 공공기관 에너지 담당자 직무 교육 (220명) - 2010. 12월 : 2차 에너지 담당자 Work-Shop 개최 (55명) ❍ 집 행 액 : 14백만원
향후계획		❍ 에너지 담당자 직무능력 배양을 교육 지속실시
성과	목표	❍ 유관기관 워크숍 1회, 공공기관 담당자 교육 2회 전문기관 위탁교육 1회, 에너지 담당공무원 해외연수 1명
	성과	❍ 직무능력 배양 실적 : 7회 504명 - 에너지․기후변화 정책 종합설명회 : 1회 150명 - 유관기관 워크숍 : 2회 96명 - 공공기관 담당자 교육 : 2회 255명 - 전문기관 위탁교육 : 1회 2명 - 에너지 담당공무원 해외연수 : 1회 1명(일본)
	기대효과	❍ 에너지관련 전문지식 및 업무능력 향상 ❍ 에너지 담당자 화합을 통한 유관기관 등과의 유대강화
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 에너지 담당자의 직무능력 배양을 위한 교육을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 5		구 분	녹색생활			추진부서		환경정책과
사 업 명		저탄소 녹색통장 갖기 운동(탄소포인트) 추진
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 가정, 상가, 건물 소유주(세대주) - 항목 : 전기, 수도 - 내용 : 기준사용량(과거 2년 사용량) 대비 감축량 비교 ❍ 사 업 비 : 216백만원(국 108, 시 54, 군구 54)
추진실적		❍ 추진실적 - 녹색통장 참여자 모집 : 47,800세대(누계 53,000세대) - 상반기 탄소포인트(전기․수도 사용량) 검증(6월말 기준) ․36,706세대 참여, 442,872kg CO2 감축(감축율 3%) ❍ 집 행 액 : 216백만원 (군구에 교부)
향후계획		❍ ‘11. 4월 : ’10년도 최종 탄소포인트(전기․수도 사용량) 검증 ❍ 녹색통장 갖기(탄소포인트) 운동 확대 시행 : 80,000세대
성과	목표	❍ 녹색통장 갖기 참여자 모집 : 30,000세대 ❍ 사용량 검증 및 인센티브 지급
	성과	❍ 녹색통장 갖기 참여세대 모집 : 47,800세대 (누계 53,000세대) ❍ 상반기 탄소포인트(전기․수도 사용량) 검증 (6월말 기준) - 36,706세대 참여, 442,872kg CO2 감축 (감축율 3%) ❍ ‘10. 12월 : 인센티브 216백만원 군구 교부
	기대효과	❍ 시민의 온실가스 줄이기 의식 확산 및 동기부여 ❍ 실질적인 시민 온실가스 감축행동 참여로 탄소배출 감소
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 적극적인 홍보와 인센티브 지급으로 당초 계획 이상으로 시민 참여 ❍ 시민들이 전기․수도 사용량 절약 등 실질적인 탄소배출 감소가 실생활에 정착 되도록 적극적인 홍보(인식변화) 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 6		구 분	녹색생활			추진부서		환경정책과
사 업 명		탄소발자국 우수아파트 운영
추진개요		❍ 사업내용 - 방법 : 아파트 단지 항목별 모니터링 실시, 우수아파트 선정 - 항목 : 탄소포인트 및 기후변화 교육 참여도, 전기․수도․가스 감축량, 재활용 쓰레기 수거량, 쓰레기 배출량 등 - 모니터링 요원 : 그린리더(기후코디 또는 기후지킴이) ❍ 사 업 비 : 50백만원
추진실적		❍ 추진실적 - 탄소발자국 우수아파트 지정 : 98개소 - 탄소발자국 우수아파트 참여기관 교육 : 90개소 - 녹색통장 가입 홍보 및 주민 기후교육 실시 - ‘10. 11월 : 모니터링 실시 ❍ 집 행 액 : 50백만원 (군․구에 교부)
향후계획		❍ ‘11. 1월 : ’10년 추진결과 보고 ❍ ‘11년도 탄소발자국 우수아파트 참여아파트 확대 : 150개소
성과	목표	❍ 탄소발자국 우수아파트 운영 (모집, 감축이행, 선정)
	성과	❍ 탄소발자국 우수아파트 지정 : 9개 군․구 98개소(옹진제외) ❍ ‘10. 11 ～ 12월 : 모니터링 실시 및 우수아파트 인센티브 지급 - 우수아파트 인센티브 지급 : 27개소
	기대효과	❍ 시민의 온실가스 줄이기 의식 확산 및 동기부여 ❍ 실질적인 시민 온실가스 감축행동 참여로 탄소배출 감소
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 탄소발자국 우수아파트 지정 및 모니터링에 따른 인센티브 지급을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 7		구 분	녹색생활			추진부서		신성장동력과
사 업 명		탄소 - 포인트제도 시행
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 탄소-포인트제도 참여 신청가정 - 방법 : 도시가스 사용 절감실적 확인 ❍ 사 업 비 : 100백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1월 : 탄소-포인트제도 참여가정 모집(5,906세대) - ‘10. 2 ～ 4월 : 도시가스 사용 절감 시행 - ‘10. 6월 : 참여가정 도시가스 사용실적 확인 및 정리 - ‘10. 7월 : 탄소-포인트 지급대상 선정 및 인센티브 지급 ❍ 집 행 액 : 81.5백만원
향후계획		❍ 탄소-포인트제도 지속 실시
성과	목표	❍ 탄소-포인트제도 참여가정 모집 및 시행
	성과	❍ 탄소-포인트제도 참여가정 모집 : 5,906세대 ❍ 시행결과 - 우수가정 2,478세대 81,530천원 포인트 지급 - 도시가스 43,967㎥ 절감 (절감금액 : 36,273천원) - 온실가스 98.1 tCO2 감축
	기대효과	❍ 시민의 기후변화 심각성 및 대응 필요성 인식 제고 ❍ 시민의 에너지 절감을 통한 온실가스 배출 경감 체험
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 도시가스 사용에 대한 탄소-포인트제도 운영을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 8		구 분	녹색생활			추진부서		환경정책과
사 업 명		그린스타트 인천네트워크 실천운동 확산
추진개요		❍ 사업내용 - 녹색 소비문화 확산을 위한 홍보사업 - 온실가스 줄이기 실천운동 전개 ※ ‘09. 1월 : 그린스타트 인천네트워크 구성 ❍ 사 업 비 : 180백만원 (국 90, 시 90)
추진실적		❍ 추진실적 - 그린리더(기후강사, 기후지킴이) 양성 : 총 972명 - 기후변화 체험관 홍보부스 운영 : 58회(13,500여명 참여) - 녹색응원문화 조성 캠페인 실시 : 3회, 3개소(‘10. 6월) - 각종 홍보물 제작 : 녹색통장 홍보물, 팜플렛, 자, 수첩 등 - 전광판 홍보 : 버스정류소 안내기, 대기오염전광판, 지하철 등 ❍ 집 행 액 : 180백만원
향후계획		❍ 그린리더 활동 지원․적극 활용 ❍ 저탄소 녹색생활 실천 프로그램 발굴 추진
성과	목표	❍ 녹색 소비문화 홍보 및 녹색생활 실천 활동 전개
	성과	❍ 그린리더 양성 : 972명 - 기후강사 84명, 기후지킴이 840명, 청소년 기후지킴이 48명 ❍ 기후변화 체험관 홍보부스 운영 : 58회 13,500명 참여 ❍ 녹색 응원문화 조성 캠페인 실시 : 3회 ❍ 기타 각종 홍보물 제작 배부, 전광판 홍보 실시
	기대효과	❍ 녹색 소비문화, 녹색생활 실천 등 시민 일상생활에서 온실가스 줄이기 범시민 실천운동 확산
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 그린리더 양성을 통해 홍보 및 실천운동을 정상적으로 추진 ❍ 양성한 그린리더를 적극적으로 활용

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 9		구 분	녹색생활			추진부서		신성장동력과
사 업 명		에너지 절약 및 효율화 실천 홍보
추진개요		❍ 사업내용 - 가정, 직장 등 분야별 에너지 절약 저감 매뉴얼 제작 - 시민단체와 함께하는 에너지 절약운동 전개 - 언론매체 등을 활용한 홍보강화 - 에너지 절약의 달 행사와 연계한 에너지 절약 홍보 ❍ 사 업 비 : 109백만원 (국비)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4～10월 : 녹색생활 실천 100만명 서명운동 전개 - ‘10. 4～10월 : Green Day 행사실시 (7회) - ‘10. 5월 : 여름철 전기절약 캠페인「에너지빼기 사랑더하기」 - ‘10. 6월 : Green Sport 구현을 위한 홍보물 제작(2종 3,000매) - ‘10. 7월 : 에너지절약 홍보용 리플렛 제작 배포 (4,000부) - ‘10. 8월 : 에너지절약 캠페인 (인천터미널 / 17명 참석) - ‘10.10월 : 에너지절약 조기교육 및 홍보를 위한 교재 구입 배포 (배포처 : 관내 초등학교 및 중학교 / 9,162부) - ‘10.11월 : 녹색생활 실천 홍보물 제작 (충전용 교통카드 등 3종) - ‘10.12월 : 에너지절약 홍보용 탁상용 달력 제작 배포 (5,300부) ❍ 집 행 액 : 109백만원
향후계획		❍ 에너지 절약 홍보 지속 추진
성과	목표	❍ 에너지 절약 홍보물 제작 및 녹색생활 캠페인 전개
	성과	❍ 에너지 절약 홍보 : 6건 - 반상회, Green Sports 구현 리플렛, 에너지절약 홍보 리플렛, 초중 교육교재, 녹색생활 실천 교통카드, 에너지절약 탁상용 달력 ❍ 녹색생활 캠페인 전개 : 5회 - 100만명 서면운동, Green Day 행사, 녹색생활 실천, 여름철 전기절약, 에너지절약
	기대효과	❍ 범시민적 녹색생활 실천 분위기 확산 및 자율적 참여 유도
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 에너지 절약 홍보 및 캠페인을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 10		구 분	녹색생활			추진부서		위생정책과
사 업 명		Green Food 운동
추진개요		❍ 사업내용 - 참여업소 : 1,000개소 - 홍보방송 : 3,600회 - 실천내용 : 3無 3親 실천운동, 간소한 상차림, 사전예약 등 ❍ 사 업 비 : 70백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2월 : 인천시 음식문화개선 종합계획 수립 - ‘10. 6월 :『남은음식 제로운동』방송홍보 자료 제작 완료 - ‘10. 7. 8 : 2010『원스푸드』실천 범국민 결의대회 - ‘10. 7~9월 :『남은음식 제로운동』5개 케이블방송 방영 - ‘10. 9~12월 : 원스푸드 지정업소 소형․복합찬기 및 홍보 위생용품 지원 ○ 2010. 11~12월 : 군․구별 평가 ❍ 집 행 액 : 68백만원
향후계획		❍ '11년부터는 Green Food를 Once Food 운동으로 변경하여 음식물쓰레기 줄이기 사업 지속 추진
성과	목표	❍ 그린푸드 참여업소 1,000개소, 음식문화 개선방송 3,600회
	성과	❍ Green Food 참여업소 : 680개소 ❍ 음식문화 개선방송 : 3,600회 실시
	기대효과	❍ 낭비 없는 음식문화 유도로 녹색생활 정착 ❍ 쓰레기 처리비용, 식품재료 원가 등 절감으로 서비스 질 향상
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 그린푸드 운동을 계획대로 정상 추진하였으나, 참여업체 목표에는 다소 미흡 - 대부분 시민들은 음식문화 개선에 대하여 인식하고 있으나, 현장에서 실천 참여의지 부족 ❍ 음식문화 개선을 위한 다각적이고 지속적인 홍보․계도 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 11		구 분	녹색생활			추진부서		환경정책과
사 업 명		탄소발자국 모니터링
추진개요		❍ 사업내용 - 각종 행사에 대한 탄소발자국 모니터링 - 모니터링 : 기후지킴이, 기후코디 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ 저탄소 녹색행사 개최 : 15회 3,800명 참여 - 모니터링 결과 : 탄소 발생 총량 75,173kg CO2 - 탄소상쇄금 산정액 : 3,758,755원
향후계획		❍ 녹색행사 모니터링을 통한 탄소상쇄 공원 조성 추진 ❍ 탄소발자국 모니터링 지속 추진
성과	목표	❍ 녹색행사 모니터링 : 4회
	성과	❍ 녹색행사 모니터링 : 15회 - 모니터링 결과 : 탄소 발생 총량 75,173kg CO2 * 어린소나무 26,847그루 나무심기 필요(어린소나무 2.8kg 상쇄) - 탄소상쇄금 산정액 : 3,758,755원
	기대효과	❍ 탄소발자국 모니터링을 통하여 시민들에게 녹색생활 인식 확산
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 탄소발자국 모니터링을 기후지킴이․기후코디를 통해 목표이상으로 실시 ❍ 인천시 모든 행사에 탄소발자국 모니터링 실시, 탄소발생량에 대한 상쇄금 징구방안 강구

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 12		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		공공기관 LED 조명기기 보급
추진개요		❍ 사업내용 - 내용 : 군․구 공공청사에 고효율 LED 조명기기 보급 - 규모 : 형광등 외 2종 10,000개 교체 ❍ 사 업 비 : 1,000백만원(국 600, 시 200, 군구 200)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4월 : 10개 군․구 보조금 교부 - ‘10. 4 ～ 12월 : LED 조명기기 6,090개 교체 ❍ 집 행 액 : 978백만원
향후계획		❍ 공공청사에 고효율 LED 조명기기 보급 지속 추진
성과	목표	❍ LED 조명기기 10,000개 교체
	성과	❍ 10개 군․구 공공청사 LED 조명기기 6,090개 교체
	기대효과	❍ 에너지이용 효율 향상 및 온실가스 감축 확산
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ LED 조명기기의 목표대비 설치 수량에는 차이가 있으나 정상적으로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 3 - 13		구 분	녹색기반			추진부서		인재개발원
사 업 명		친환경 녹색도시 성장을 위한 창조적인 인재양성
추진개요		❍ 사업내용 - 친환경 녹색성장 정책에 대한 공감대 형성 교육 - 친환경 명품도시 건설을 위한 전문기술 교육 - 친환경 명품도시를 이끌 올바른 공직자 분위기 조성 ❍ 사 업 비 : 50백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2 ～ 11월 : 저탄소 녹색성장 교육과정 운영 ․기본교육(신규채용자반) 3회 386명 ․장기교육 2회 50명, ․전문교육 15회 571명 - ‘10. 8. 26, 9. 10 : 저탄소 녹색성장과정 군구 방문 2회 교육 ❍ 집 행 액 : 50백만원
향후계획		❍ 교육훈련 과정에 저탄소 녹색성장과정 교육과목 지속 편성운영
성과	목표	❍ 저탄소 녹색성장 교육과정 운영
	성과	❍ 저탄소 녹색성장 교육과정 운영 : 20회 1,007명 - 기본교육(신규채용자반) : 소양과목 3회 386명 - 장기교육 소양과목 : 2회 50명, - 전문교육(저탄소 녹색성장과정, 자전기이용활성화과정 등) : 15회 571명
	기대효과	❍ 녹색성장에 대한 전략을 효율적․체계적으로 실행할 수 있는 인재양성
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 녹색성장에 대한 공무원의 인식과 공감대 형성을 위하여 계획대로 교육 시행 ❍ 녹색성장 교육과정을 폭넓게 확대시행 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 4 - 1		구 분	녹색기반			추진부서		물관리과
사 업 명		글로벌 3대 물 포럼 육성
추진개요		❍ 사업내용 - 주제 : 물과 도시의 혁신과 조화 - 기간 : ‘10. 8. 10 ～ 8. 12 - 주최 : 인천광역시, 한강수계관리위원회 - 주관 : 세계도시물포럼조직위원회 ❍ 사 업 비 : 400백만원 (국 200, 시, 200)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2월 : 2010세계도시물포럼 조직위원회 - ‘10. 4월 : 세계도시물포럼 발전방안 수립 - ‘10. 8. 10 ～ 8. 12 : 세계도시물포럼 인프라워크숍 개최 - ‘10. 12월 : 개최결과 보고서 발간 ❍ 집 행 액 : 400백만원
향후계획		❍ 물 시범도시로서의 역할 추진
성과	목표	❍ 2010세계도시물포럼 개최
	성과	❍ 2010 세계도시 물 포럼 개최 - 기간 : ‘10. 8. 10 ～ 8. 12 (3일간) - 내용 : 7개 주제 29개 섹션, 워크숍 7개, 심포지엄 2개, 기조연설 2명 - 참여인원 : 25개국 1,700명(물관련 전문가, 정부, 기업, NGO 등)
	기대효과	❍ 세계도시물포럼이 경제수도 인천 조성에 기여
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 2010세계도시물포럼 행사를 목표대로 성공적으로 개최

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 4 - 2		구 분	녹색기반			추진부서		환경정책과
사 업 명		ICLEI 세계환경회의 개최 추진
추진개요		❍ 사업내용 - 주제 : 도시의 미래 - 기간 : ‘10. 10. 5 ～ 10. 7 - 규모 : 1,000여명 참석(외국인 300, 내국인 700) - 주최 : 인천광역시, ICLEI ❍ 사 업 비 : 1,092백만원 (국 100, 시, 992)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 10. 5 ～ 10. 7 : 2010 ICLEI 세계환경회의 개최 ․참가인원 : 1,800명(해외 : 133개 도시 264명 참가) ․내 용 : 개폐막식, 기조발표, 주제별 섹션 - ‘10. 12월 : 결과보고서 작성 ❍ 집 행 액 : 974백만원 (잔액 ‘11. 1월 정산 집행예정)
향후계획		❍ 2010 ICLEI 세계환경회의 후속사업 추진 - 생태효율 향상보고서 및 지속가능발전 보고서 작성
성과	목표	❍ 2010 ICLEI 세계환경회의 개최
	성과	❍ 2010 ICLEI 세계환경회의 개최 - 기간 : ‘10. 10. 5 ～ 10. 7 - 내용 : 개폐막식, 기조발표, 주제별 세션 등 - 참여인원 : 1,800명(해외 133개 도시 264명 참가)
	기대효과	❍ 세계 지방자치단체 기후변화대응 노력의 선도적 역할 수행 ❍ UN기구 및 ICLEI 회원 지자체들과 파트너십 구축
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 2010 ICLEI 세계환경회의를 계획대로 성공적으로 개최

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 4 - 3		구 분	녹색기반			추진부서		환경정책과
사 업 명		EAAF 파트너십 사무국 협력체계 구축
추진개요		❍ 사업내용 - 파트너십 구성 : 총 24개 회원 ․정부(12), 국제민간단체(9), 국제기구(3) - 인력현황 : 사무국장, 시 파견인력 3명, 계약직 3명 - 역 활 ․파트너십 정보관리, 제공 및 교육, 홍보 ․프로젝트 연구, 개발 및 제원조달 지원 ․파트너십 운영 및 행정지원 등 ❍ 사 업 비 : 509백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2. 23 ~ 2. 25 : 제4차 파트너십 총회 및 행사 개최 - ‘10. 5. 7 : 철새의 날 기념 철새도래지 탐방(초등생 및 학부모 70명) - ‘10. 2 ~ 10. 9 : 국ㆍ내외 서식지 확인 및 실태 조사 15개소 - 연중 : 철새 이동경로 연구 및 모니터링, 지식 및 정보 교환 증진 ❍ 집 행 액 : 509백만원
향후계획		❍ 철새 이동경로, 서식지 보전 등 활동 지속 추진
성과	목표	❍ EAAF 파트너십 사무국 운영
	성과	❍ EAAF 파트너십 사무국 운영 (24개 회원) - 서식지 확인․실태조사 15개소, EAAF 웹 백과사전 등록, 파트너 가입 유치 4개소, EAAF 서식지 사이트 인증 2개소등 활동
	기대효과	❍ 철새 수도 인천 브랜드화 및 국제적 친환경 생태도시 이미지 제고
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ EAAF 파트너십 사무국을 목표대로 정상적으로 운영 ※ EAAF 파트너쉽 사무국 성격 : 동아시아~대양주 이동경로(East Asian - Australasian Flyway)상의 철새 및 그 서식지 보전을 위해 협력하는 자발적이고 비형식적인 협의체 성격의 국제기구

단위사업별 점검․평가표
관리번호		1 - 4 - 4		구 분	녹색생활			추진부서		환경정책과
사 업 명		녹색구매로 저탄소 사회 조성
추진개요		❍ 사업내용 - 녹색구매 활성화(공공무문 의무구매 등) - 친환경상품 상설 전시판매장 설치․운영 - 제회 인천국제환경기술전 개최(‘10. 10. 5 ～ 10. 8) ❍ 사 업 비 : 345백만원 (국 45, 시 300)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1 ~ 7월 : 군․구 녹색구매 관련 조례 제정 완료 - ‘10. 2. 19 : 친환경상품 구매 담당자 교육(시, 군․구, 학교 등) - ‘10. 4. 21 : 친환경제품 전시판매장 3자 협약 체결 - ‘10. 7. 29 : 친환경제품 전시판매장 개소 - ‘10. 10. 5 ~ 10. 8 : 인천국제환경기술전 개최 ❍ 집 행 액 : 345백만원
향후계획		❍ 해외 환경박람회 참가, 친환경상품 구매담당자 교육 등 녹색구매․소비 홍보 지속추진
성과	목표	❍ 제8회 인천국제환경기술전 개최 ❍ 녹색구매 활성화 추진
	성과	❍ 제8회 인천국제환경기술전 개최(‘10. 10. 5 ～ 10. 8, 4일간) - 규모 : 208기업 389부스 (해외 13개국 22기업) - 내용 : 국내․외 우수환경기술 전시, 신기술 발표회 등 ❍ 친환경 상품 상설 전시판매장 개소(‘10. 7. 29) ❍ 녹색구매 활성화 추진 - 친환경상품 구매 촉진에 관한 조례 제정 완료 * ‘09년 7개 기관, ’10년 4개 기관(동, 남, 연수, 남동) - 친환경상품 구매담당자 교육
	기대효과	❍ 녹색기술개발 촉진 및 판로개척으로 녹색성장 기반 조성 ❍ 공공기관 친환경 녹색상품 의무구매 확립으로 선도 ❍ 녹색제품 정보제공 강화로 시민생활 행동변화 유도
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 제8회 인천국제환경기술전 개최 및 녹색구매 활성화를 위하여 목표대로 정상 추진 ❍ 친환경상품 상설 전시판매장 운영 활성화 방안 강구

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 1 - 1		구 분	녹색기반			추진부서		환경정책과
사 업 명		기후변화 종합대책 수립
추진개요		❍ 사업내용 - 인천광역시 기후변화 종합계획 수립용역 실시 ․기간 : ‘09. 1월 ～ ’10. 2월 ․내용 : 분야별 온실가스 감축방안 등 제시 ❍ 사 업 비 : 비 예산 (‘09년도 188백만원 이월사업비로 추진)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘09. 2월 : 착수보고회 개최 - ‘09. 9월, 11월 : 중간보고회 개최 - ‘09. 12월 : 시민 환경포럼(공청회) 개최 - ‘10. 3월 : 최종보고회 개최
향후계획		❍ 기후변화대응 연차별 시행계획 수립
성과	목표	❍ 기후변화 종합계획 수립
	성과	❍ ‘10. 3월 : 기후변화 종합계획 수립 완료
	기대효과	❍ 기후변화대응을 위한 목표 및 로드맵 제시 ❍ 기후변화대응 전략사업 도출로 인천시 기본방향 제시
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 기후변화 종합계획을 목표대로 정상적으로 수립 완료 ❍ 기후변화 종합계획에 따른 연차별 세부시행계획 수립 및 실효성 있는 추진방안 강구

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 1 - 2		구 분	녹색기반			추진부서		경제자유구역청
사 업 명		Low Carbon IFEZ 30 추진
추진개요		❍ 사 업 명 : 『저탄소 녹색도시 IFEZ 조성』을 위한 Low Carbon IFEZ 30 Action Plan 수립 용역 ❍ 사업기간 : ‘10. 3 ~ ’12. 2 ❍ 사업범위 : 인천경제자유구역 탄소배출 Inventory 구축과 저탄소 녹색도시 분야별 추진지표 설정 ❍ 사 업 비 : 294백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ’09. 12 : Low Carbon IFEZ 30 추진 계획 수립 - ’10. 01 : Low Carbon IFEZ 30 추진을 위한 연구용역 계획 수립 - ’10. 04 : 연구 용역 계약 및 착수 - ’10. 08 : 연구 용역 중간발표회 개최 - ’10. 11 : 전문가 토론회 개최 ❍ 집 행 액 : 147백만원 (잔액 이월 - 준공시기 미도래)
향후계획		❍ 용역 완료 및 분야별 Low Carbon IFEZ 30 추진계회 수립 - ‘11. 4월 최종보고회 개최
성과	목표	❍ Low Carbon IFEZ 30 Action Plan 수립 용역 발주
	성과	❍ ‘10. 4월 : Low Carbon IFEZ 30 Action Plan 수립 용역 계약 및 착수(인천발전연구원, 기후변화센터)
	기대효과	❍ 2012 기후변화체제(POST-2012) 의무이행과 세계도시로서의 진입을 위한 Global Eco City 저탄소 녹색도시 달성
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ Low Carbon IFEZ 30 Action Plan 수립 용역을 목표대로 정상적으로 착수 ❍ ‘11. 4월 용역완료 이후 후속사업으로 분야별 세부 시행계획 수립 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 1 - 3		구 분	녹색건축물			추진부서		항만공항정책과
사 업 명		인천국제공항 온실가스 감축
추진개요		❍ 사업내용 - 신재생에너지 도입(태양광 550kw급) - 저탄소 에너지 고효율 장비 도입(LED 램프, 친환경자동차) - 항공기 전용 경량형 화물탑재용기 보급 ❍ 사 업 비 : 5,375백만원 (시 145, 민자 5,230)
추진실적		❍ 추진실적 - '11. 4월 : 문화복지관 태양광발전설비(550kw) 설치 완료 - '10. 11. 30 : 고효율 LED 등기구 및 램프 설치완료(6,726개) - '10. 3. 22 : 친환경 자동차(하이브리드) 2대 구매 완료 - ‘10. 9. 1 : 항공기전용 경량형 화물탑재용기 386개 보급 ❍ 집 행 액 : 5,375백만원
향후계획		❍ 인천국제공항 온실가스 감축사업 지속 추진
성과	목표	❍ 550kw 태양광 발전설비 1개소 설치 ❍ LED 램프 6,726개 설치 ❍ 친환경자동차 4대 구입 ❍ 경량 화물탑재용기 300개 보급
	성과	❍ 문화복지관에 550kw 태양광 발전설비 설치 완료 ❍ 고효율 LED 등기구 및 램프 6,726개 설치 완료 ❍ 친환경 자동차(하이브리드) 2대 구입 ❍ 경량 화물탑재용기 386개 보급
	기대효과	❍ LED 램프, 친환경자동차, 경량형 화물탑재용기 보급으로 에너지 절약 및 탄소배출 저감
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 태양광 발전설비 설치, LED 램프 교체, 친환경 자동차 구입, 경량 화물탑재용기 보급을 정상적으로 추진 - 친환경 전기자동차 2대의 경우 구매수요가 없고, 도로주행등 효율이 떨어짐에 따라 자체 구입불가 결정

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 2 - 1		구 분	녹색기반			추진부서		환경정책과
사 업 명		온실가스 인벤토리 구축
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : '10 ～ '11년 - 온실가스 배출량 조사 및 온실가스 감축 잠재량 산정(8개 지역) : 배출량 조사, 감축잠재량 산정, 감축방안 제시 - 온실가스 통계 조사․연구사업과 연계 ❍ 사 업 비 : 120백만원 (국 60, 군구 60)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3월 : 한국환경공단 협약 체결 - ‘10. 4월 : 온실가스 배출량 조사 착수 (남구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구) - ‘10. 6월 : 강화군 배출량조사 완료 - ‘10. 12월 : 옹진군 배출량조사 완료 - ‘10. 12월 : 6개 구 온실가스 배출량 조사 완료 ❍ 집 행 액 : 120백만원
향후계획		❍ 중구․동구 온실가스 배출량 조사
성과	목표	❍ 온실가스 배출량 조사 (8개 지역)
	성과	❍ 온실가스 배출량 8개 지역 조사 완료(10개소 중 8개소 완료) - 남구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
	기대효과	❍ 온실가스 인벤토리 구축을 통한 정확한 온실가스 감축목료 설정
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 8개 지역에 대한 온실가스 배출량 조사를 목표대로 정상적으로 조사 완료 ❍ 10개 지역 조사완료 후 온실가스 감축 방안 수립 등 자료적극 활용

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 3 - 1		구 분	녹색기반			추진부서		보건환경연구원
사 업 명		온실가스 발생 모니터링 및 식물․수목 온실가스 감축능력 실태조사
추진개요		❍ 사업내용 - 기후변화 대응을 위한 온실가스 모니터링 ․온실가스 상시 측정시스템 및 측정망의 확대구축 ․대기측정자료 및 기상자료를 통계분석용 DB로 구축 등 - 식물․수목에 의한 온실가스 감축능력 실태조사 ․도시녹지수목, 가로수, 산림에 의한 온실가스 감축능력조사 ․녹지대의 대기정화 효과 조사 등 ❍ 사 업 비 : 444백만원 (국 37, 시 407)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1. 5 : 동절기 수목 온실가스 흡수량 실태조사 - ‘10. 3. 23 : 춘절기 수목 온실가스 흡수량 실태조사 - ‘10. 6. 9 : 온실가스측정시스템(메탄가스측정기)설치완료 - ‘10. 6. 18 : 엽록소 형광측정기 설치완료 - ‘10. 7. 19 : 하절기 수목의 이산화탄소 흡수량 측정조사 - ‘10. 8. 23 : 녹지대 대기 정화효과 조사 - ‘10. 9. 24 : 추절기 수목의 이산화탄소 흡수량 측정조사 - ‘10. 10. 15 : 생태환경적응도 및 수목이 갖는 경제적 가치평가 ❍ 집 행 액 : 444백만원
향후계획		❍ 온실가스 농도변화의 지속적 모니터링
성과	목표	❍ 온실가스 측정망 확충 : 2개소 ❍ 온실가스 변화 관측 : 75,000건 ❍ 식물․수목의 탄소 흡수능력 조사 : 120회 ❍ 녹지대 대기정화 효과 조사 : 64회
	성과	❍ 온실가스 측정망 설치 : 2개소(메탄-송해 측정소, CO2-부평역 측정소) ❍ 온실가스 변화 관측 : 87,480건 ❍ 식물․수목의 탄소 흡수능력 조사 : 396회 ❍ 녹지대 대기정화 효과 조사 : 208회
	기대효과	❍ 기후변화대응 정책수립의 기초 및 근거자료 활용
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 온실가스 발생 모니터링 및 식물․수목 온실가스 감축능력 실태조사를 목표이상으로 조사 완료 ❍ 온실가스 변화관측, 탄소 흡수능력 조사 자료 등의 적극 활용

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 4 - 1		구 분	녹색건축물			추진부서		공원녹지과
사 업 명		건물 및 옥상녹화 사업
추진개요		❍ 사업내용 - 위치 : 동구 재능대학 등 24개소 - 면적 : 7천㎡ - 내용 : 수목식재 및 휴게시설 조성(옥상녹화, 입면녹화) ❍ 사 업 비 : 594백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1. 12 : 도시녹화사업 보조금 교부 - ‘10. 1 ～ 3월 : 실시설계 - ‘10. 4 ～ 12월 : 옥상 및 입면 녹화 완료 - ‘10. 7 ～ 9월 : ’11년도 대상조사 및 선정(20개소, 6천㎡) ❍ 집 행 액 : 551백만원
향후계획		❍ 20개소, 6천㎡에 옥상 및 입면 녹화
성과	목표	❍ 건물 및 옥상녹화 : 15개소 5천㎡
	성과	❍ 건물 및 옥상녹화 : 24개소 7천㎡
	기대효과	❍ 도심의 부족한 녹지 공간 확보 및 탄소 감축 효과 ❍ 도심 열섬화 현상 완화 및 도시경관 개선
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 건물 및 옥상녹화 사업을 목표이상으로 정상 추진 ❍ 설치된 수목 및 휴게시설 등 사후관리 철저

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 4 - 2		구 분	녹색공간			추진부서		공원녹지과
사 업 명		도심속 생명의 숲 1천만㎡ 늘리기
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘06. 7 ～ ’10. 6 - 내용 : 도심속 생명의 숲 1천만㎡ 늘리기 ․시민 1인당 3.3㎡ 늘리기 ․1인당 공원, 녹지 조성면적 8.9㎡ → 11.2㎡ 향상 ❍ 사 업 비 : 186,400백만원 (국 13,000, 시 140,000, 군구 9,400, 민자 24,000)
추진실적		❍ 추진실적 - 계 : 14,327천㎡ (공공 11,209천㎡, 민간 3,118천㎡) - ‘06년 : 1,356천㎡ (공공 1,265천㎡, 민간 91천㎡) - ‘07년 : 4,457천㎡ (공공 3,917천㎡, 민간 540천㎡) - ‘08년 : 3,353천㎡ (공공 2,795천㎡, 민간 558천㎡) - ‘09년 : 3,547천㎡ (공공 2,142천㎡, 민간 1,405천㎡) - ‘10년 : 1,614천㎡ (공공 1,090천㎡, 민간 524천㎡) ❍ 집 행 액 : 186,400백만원
향후계획		❍ 공원․녹지 조성사업 지속 추진
성과	목표	❍ 공원․녹지 조성 : 1,370천㎡
	성과	❍ 공원․녹지 조성 : 1,614천㎡(공공 1,090천㎡, 민간 524천㎡) - 공공 : 공원․녹지, 웰빙 녹지, 학교 생태 숲, 공공시설 숲 - 민간 : 담장․옥상녹화, 아파트단지 조경 등 * ‘06. 7 ～ ’10. 6 기간동안 총 14,327천㎡ 완료
	기대효과	❍ 도심 녹지 확충에 따른 시민의 삶의 질 향상 ❍ 공원․녹지 면적 대폭 향상으로 시계 주요도시 근접 - 1인당 공원․녹지 면적 : 8.9㎡ → 13.6㎡ → 13.6㎡
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ ‘10년도 도심속 공원․녹지 조성사업을 목표이상으로 완료 ❍ ‘06. 7 ～ ’10. 6 기간동안 총 14,327천㎡ (공공 11,209천㎡, 민간 3,118천㎡) 완료 - 1인당 늘리기 목표 : 3.3㎡ → 4.7㎡ (1.4㎡ 초과달성)

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 5 - 1		구 분	녹색기반			추진부서		환경정책과
사 업 명		기후변화 정보 공유
추진개요		❍ 사업내용 - 기후변화 정보공유 : 시 홈페이지 활용 - 기후변화 정보 공개 등 관련 동영상 제작 보급 - 시민․학생 등 분야별 교육을 위한 교육교재 마련 보급 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ ‘10. 6월 : 기후변화 홍보 동영상 제작 ❍ 연중 : 홈페이지를 통한 홍보(20회)
향후계획		❍ 홈페이지를 통한 홍보 지속 추진
성과	목표	❍ 홈페이지 정보공유, 동영상 제작
	성과	❍ 홈페이지 정보공유 20회 ❍ 동영상 제작 1개(5분용) : 교육용 활용 및 홈페이지 게재 홍보
	기대효과	❍ 기후변화의 중요성 및 정보를 시민에게 공유함으로써 시민의 알권리 충족 ❍ 정보공유와 함께 교육을 병행하여 저탄소 생활로의 시민의식 고취
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 기후변화 정보공유 및 동영상 제작을 목표대로 정상 추진 ❍ 기후변화 정보공유 확대방안 강구

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 5 - 2		구 분	녹색기반			추진부서		정보화담당관실
사 업 명		그린 통합데이터센터(IDC) 구축
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘09 ～ ’11년(3개년) - 규모 : 연면적 6,443㎡, 지하 1, 지상 6층 - 내용 ․최첨단 IT인프라를 갖춘 친환경 그린데이터 센터 건립 ․통합전산기반 환경 구축 및 정보시스템 이전 설치 ❍ 사 업 비 : 11,320백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2 ～ 4월 : 건축공사, 전기공사, 소방공사(기계, 전기), 정보통신공사 착공 - ‘10. 9. 1 : 전산기반 환경 구축 용역 착수 ❍ 집 행 액 : 6,825백만원 (잔액 계속비 이월)
향후계획		❍ ‘11. 5 ～ 7월 : 통합운영관리시스템 시험운영 ❍ ‘ 11. 8월 : 센터 준공
성과	목표	❍ 통합데이터 센터 건립공사 진척도 : 54%
	성과	❍ 통합데이터 센터 건립공사 진척도 : 54% - 건축․전기․소방(기계, 전기)․정보통신공사 착공 ․토목 및 골조공사 완료 - 전산기반 환경구축 용역 착수 ․상세설계 및 통합운영관리시스템 구축 완료
	기대효과	❍ 신재생에너지 설비, 에너지관리시스템, 대체 에너지를 활용한 친환경 고효율 데이터 구축으로 CO2 배출량 30% 이상 감축
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 통합데이터센터 건립을 목표대로 정상 추진 - ‘11. 8월 준공예정

단위사업별 점검․평가표
관리번호		2 - 5 - 3		구 분	녹색생활			추진부서		세정과
사 업 명		종이 없는 녹색 세정정보화 추진
추진개요		❍ 사업내용 - 정기분 지방세고지서 E-mail 발송(면허세, 자동차세, 주민세, 재산세) ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ 전자고지서 납부시스템 운영 : 연중 ❍ 지방세고지서 E-mail 발송 - 6회 4개 종목(면허세, 자동차세, 주민세, 재산세)
향후계획		❍ 지방세고지서 E-mail 발송 대상 확대 추진
성과	목표	❍ 전자고지 : 130,000건
	성과	❍ 전자고지 : 6회 4개 종목 142,894건 - 면허세 : 1회 5,701건 - 자동차세 : 2회 45,093건 - 재산세 : 2회 59,615건 - 주민세 : 1건 32,485건
	기대효과	❍ 종이 없는 세무행정 추진으로 저탄소 국가정책에 일조
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 지방세 전자고지를 목표이상으로 전자고지 ❍ 전자고지 대상 등 확대 시행 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 1 - 1		구 분	녹색일자리			추진부서		농업기술센터
사 업 명		녹색성장 실현을 위한 5대 명품 농축산물 육성
추진개요		❍ 사업내용 - 규모 : 5개 품목 6개 단지 26ha 1,000군 - 내용 : 5대 명품(토마토, 고추, 쌈채류, 배, 양봉) 단지 육성 ․탑베지터블(고추, 토마토, 쌈채류) 생산프로젝트 : 4단지, 6ha ․명품 남동 배 생산 프로젝트 : 1개 단지 20ha ․고품질 벌꿀 생산 프로젝트 : 1개 단지, 1,000군 ❍ 사 업 비 : 500백만원 (시 300, 민자 200)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3. 22 : 대상농가 선정(5개 품목, 6개 단지, 60 농가) - ‘10. 4월 : 사업별 보조금 교부 - ‘10. 9 ～2월 : 작목별 사업완료 보고 ❍ 집 행 액 : 500백만원
향후계획		❍ 5개 작목(토마토, 고추, 쌈채류, 배, 양봉) 육성사업 지속 추진
성과	목표	❍ 5개 작목(토마토, 고추, 쌈채류, 배, 양봉) 대상 선정 및 추진
	성과	❍ 명품농산물 육성 : 5개 품목, 6개 단지, 10농가, 1,000군, 26ha - 탑베지터블(고추, 토마토, 쌈채류) 생산프로젝트 : 3개 품목, 4개 단지 6ha(고추 2ha, 토마토 1ha, 쌈채류 3ha) - 명품 남동 배 생산 프로젝트 : 1개 품목, 1개 단지 20ha - 고품질 벌꿀 생산 프로젝트 : 1개 품목, 1개 단지, 10농가, 1,000군 ❍ 명품 남동배 수출 : ‘09년 2.6톤 → ’10년 8.3톤(과테말라)
	기대효과	❍ 농업분야 산업개발에 따른 지역경제 활성화 ❍ 최고 품질의 친환경 농축산물 생산으로 소비촉진 및 농가소득 증대
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 5대 명품 농축산물 육성사업을 목표대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 2 - 1		구 분	녹색기반			추진부서		환경정책과
사 업 명		청정개발체제(CDM) 지원사업 추진
추진개요		❍ 사업내용 - 내용 : 환경기초시설 탄소중립사업 지원 (청라, 송도, 가좌, 경서매립장) - 방법 : 인천환경공단과 전문 컨설팅업체와 공동 수행으로 환경기초시설에 대한 탄소중립프로그램 시행 ❍ 사 업 비 : 50백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3월 : 환경기초시설 탄소중립계획 수립 - ‘10. 6월 : 환경기초시설 탄소중립 착수 - ‘10. 12월 : 환경기초시설 탄소중립 프로그램 완료 ❍ 집 행 액 : 50백만원
향후계획		❍ 환경기초시설 탄소중립사업(4개소) 착수 및 완료 - 태양광 설치, 시설개선 등
성과	목표	❍ 환경기초시설 탄소중립 프로그램 시행(4개소)
	성과	❍ 환경기초시설 4개소 탄소중립 프로그램 완료 - 청라, 송도, 가좌, 경서매립장
	기대효과	❍ 지역주민의 환경기초시설에 대한 긍정적 이미지 제고 ❍ 효율적 탄소배출량 감축을 통한 저탄소 녹색사회 구현
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 환경기초시설 탄소중립 프로그램을 목표대로 정상적으로 완료 ❍ 탄소중립 프로그램에 따른 중립사업(태양광, 태양열, 시설개보수 등) 적극 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 2 - 2		구 분	녹색교통			추진부서		신성장동력과
사 업 명		그린에너지 천연가스 자동차 보급
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 관내 시내․시외버스 - 내용 ․천연가스 자동차(버스, 청소차) 보급 : 2,952대 ․천연가스 시내버스 연료비 지원 : 14,527백만원 ․천연가스 자동차 연료의 안정적 공급을 위한 충전소 확충 ❍ 사 업 비 : 2,364백만원 (국비 1,182, 시 1,182)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3 ～ 6월 : 천연가스 자동차 보급(버스 59대, 청소차 3대) - ‘10. 4월 : 3월분 천연가스버스 연료비 보조금 지원(154백만원) - ‘10. 5월 : 천연가스 충전소 1개소 확충 (충전능력 : 220대/일) - ‘10. 12월 : 4~11월분 천연가스버스 연료비 보조금 지원(350백만원) - ‘10. 7 ~ 12월 : 천연가스자동차 보급(버스 81대) ❍ 집 행 액 : 2,265백만원
향후계획		❍ 천연가스 자동차 구입보조금 및 연료비 지속 지원
성과	목표	❍ 천연가스 자동차 보급 : 113대 ❍ 천연가스 자동차 연료비 보조 : 750백만원 ❍ 천연가스 충전소 확충 : 1개소
	성과	❍ 천연가스 자동차 보급 : 143대 (버스 140대, 청소차 3대) ❍ 천연가스 자동차 연료비 보조 : 504백만원 ❍ 천연가스 충전소 확충 : 1개소 (충전능력 220대/일)
	기대효과	❍ 자동차연료 다양화로 지역에너지 이용효율화 촉진 ❍ 저공해자동차 보급을 통한 쾌적한 도시환경 조성
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 천연가스 자동차 보급 사업을 목표대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 2 - 3		구 분	녹색교통			추진부서		환경정책과
사 업 명		운행자동차 배출가스 수시점검 및 저감장치 관리
추진개요		❍ 사업내용 - 운행자동차 배출가스 수시점검 - 특정 경유자동차에 부착된 매연저감장치 성능점검 ❍ 사 업 비 : 52백만원
추진실적		❍ 추진실적 - 운행차 배출가스 수시점검 : 268,911대 - 특정경유차 부착 매연저감장치 성능점검 : 4,047대 ❍ 집 행 액 : 49백만원
향후계획		❍ 운행자동차 배출가스 수시점검, 특정 경유자동차에 부착된매연 저감장치 사후관리 지속 추진
성과	목표	❍ 운행차 배출가스 수시점검 : 260,000대 ❍ 특정경유차 부착 매연 저감장치 성능점검 : 3,100대
	성과	❍ 운행차 배출가스 수시점검 : 268,911대 ❍ 특정경유차 부착 매연저감장치 성능점검 : 3,047대
	기대효과	❍ 시민이 체감할 수 있는 맑고 깨끗한 대기환경 조성에 기여 ❍ 저감장치 부착차량의 효율적인 사후관리로 저감사업 실효성 확보 ❍ 배출가스 기준 등을 엄격하게 적용 온실가스 배출오염원의 원천적인 억제로 기후변화에 능동적으로 대처하여 지구 온난화 예방
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 운행자동차 배출가스 수시점검, 특정 경유자동차에 부착된매연 저감장치 성능점검을 목표이상으로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 2 - 4		구 분	녹색교통			추진부서		환경정책과
사 업 명		특정경유차 저공해 관리
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘04 ～ ’14 - 내용 : 특정경유차 저공해 조치 171,000대 ․배출가스 저감장치 부착, LPG 엔진개조, 조기폐차 ❍ 사 업 비 : 24,999백만원 (국 12,499.5, 시 12,499.5)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1. 13 : 2010년도 자동차 배출가스 저감대책 수립 - ‘10. 3. 9 : 경유자동차 저공해 조치 의무화 시행계획 수립 ․조치대상 17,432대(명령 7,944대/권고 9,488대) - ‘10. 8. 16 : 저공해자동차 표지발급내역 환경통계포털 시스템 입력(12,154대) - 연중 : 특정경유차 저공해 조치(9,432대) ․저감장치부착 : 5,549대 ․LPG엔진개조 : 2,274대 ․조기폐차 : 1,609대 ❍ 집 행 액 : 24,999백만원
향후계획		❍ 특정경유차 저공해 조치 지속 추진
성과	목표	❍ 특정경유차 저공해 조치 : 8,478대
	성과	❍ 특정경유차 저공해 조치 : 9,432대 - 저감장치 부착 : 5,549대 - LPG엔진 개조 : 2,274대 - 조기 폐차 : 1,609대
	기대효과	❍ 대기오염의 주요 원인인 경유차 배출가스 저감을 통해 선진국 수준의 대기환경 조성 ❍ 시민이 느끼는 실질적 체감생활 환경개선 및 건강한 삶의 질 제공
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 특정경유차 저공해 조치를 목표이상으로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 1		구 분	녹색일자리			추진부서		신성장동력과
사 업 명		복합 신․재생에너지 설치사업
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘09 ～ ’11 - 위치 : 승기하수처리장 - 내용 : 복합 신․재생에너지 설비 설치 - 용량 : 바이오가스 5,400N㎥CH4/일 ❍ 사 업 비 : 700백만원 (국비)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 6월 : 계약심사 완료 - ‘10. 12월 : 공사계약 ❍ 집 행 액 : 700백만원
향후계획		❍ ‘11. 12월 : 공사 준공
성과	목표	❍ 승기하수처리장 복합 신․재생에너지 설비 설치
	성과	❍ ‘10. 12월 : 공사계약
	기대효과	❍ 하수처리 과정에서 발생한 바이오가스 활용을 통한 신․재생에너지 생산
결 과		〇 완료	계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		〇 정상		●지연/미흡
평가결과		❍ 재원확보(국비매칭분) 지연에 따른 착공시기 다소 지연

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 2		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		도시가스 보급 확대
추진개요		❍ 사업내용 - 도시가스 공급시설 설치 ․배관 52,175m, 정압기 5개소, 보급세대 17,568세대 ❍ 사 업 비 : 17,884백만원 (시 3,000, 민자 14,884) * 민자사업자 : 인천도시가스(주), (주)삼천리
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2. 10 : 에너지사업기금 융자계획 수립 및 시행 - 10. 4. ~ 12. : 도시가스 공급시설 설치공사 ․배관연장 : 60,691m ․정 압 기 : 4개소 ․보급세대 : 29,569세대 ❍ 집 행 액 : 17,884백만원
향후계획		❍ 도시가스 보급 확대
성과	목표	❍ 도시가스 배관연장 : 52,175m ❍ 정 압 기 : 5개소 ❍ 보급세대 : 17,568세대
	성과	❍ 도시가스 배관연장 : 60,691m ❍ 정 압 기 : 4개소 ❍ 보급세대 : 29,569세대
	기대효과	❍ 도시가스 공급 확대로 시민생활 안정 도모 및 탄소발생 저감
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 도시가스 공급시설을 목표이상으로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 3		구 분	녹색건축물			추진부서		경제자유구역청
사 업 명		생활폐기물 자동집하시설 설치 추진
추진개요		❍ 사업내용 - 송도 1, 3, 5, 7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치 ․기간 : ‘07. 10 ～ ’12. 7 ․내용 : 중앙집하장 5개소, 주관로 42km, 공공투입구 등 ❍ 사 업 비 : 31,300백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2. 4 : 송도 5, 7공구 기본설계 심의 - ‘10. 6. 30 : 송도 5, 7공구 실시설계 적격심의 승인 - ‘10. 8. 13 : 송도 5, 7공구 자동집하시설 공사 착공 - ‘10. 10. 27 : 송도 5, 7공구 자동집하처리시설 폐기물처리시설 승인 - ‘10. 12. 20 : 송도 1공구 자동집하시설 공사 준공 ❍ 집 행 액 : 28,700백만원 (잔액 계속비 이월)
향후계획		❍ ‘11. 10월 : 송도 3공구 자동집하시설 공사 준공 ❍ ‘11. 11월 : 전처리시설 및 자원순환시설 공사 발주 ❍ ‘12. 7월 : 송도 5, 7공구 자동집하시설 공사 준공 ❍ ‘14. 12월 : 생활폐기물 전처리, 자원순환시설 공사 준공
성과	목표	❍ 송도 1, 3, 5, 7공구 자동집하시설 공사 추진
	성과	❍ 송도 1공구 자동집하시설 공사 준공 ❍ 송도 3공구 자동집하시설 공사중 (‘11. 10월 준공예정) ❍ 송도 5, 7공구 자동집하시설 공사 착공(‘12. 7월 준공예정)
	기대효과	❍ 폐기물 무 배출 시스템으로 자원순환형 녹색도시 실현
결 과		〇 완료	계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 송도 1, 3, 5, 7공구 생활폐기물 자동집하시설 설치를 목표대로 정상적으로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 4		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		공공기관 단열 개․보수
추진개요		❍ 사업내용 - 위치 : 시본청, 동구․연수․남동․계양․서구 - 내용 : 공공청사 노후창호 교체 및 단열필름 설치 - 규모 : 16,000㎡ ❍ 사 업 비 : 890백만원 (국 534, 시 243, 군구 113)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 9월 : 시 청사 시스템창호 설치공사 완료 - ‘10. 8월 : 동구, 남동, 계양, 서구 단열필름 설치 완료 - ‘10.12월 : 시(민원동․의회동), 연수구 단열필름 설치 완료 ❍ 집 행 액 : 856백만원
향후계획		❍ 단열 개․보수 지속 추진
성과	목표	❍ 단열 개․보수 : 16,000㎡
	성과	❍ 단열 개․보수(단열필름 설치) : 6개소 16,958㎡ - 시본청(민원동, 의회동), 동구, 연수구, 남동구, 계양구, 서구 ❍ 시 청사 시스템창호 설치공사 완료
	기대효과	❍ 공공청사 외벽에 단열창호 및 필름설치로 에너지 낭비요인 제거
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 공공청사 노후 창호 교체 및 단열필름 설치를 목표대로 정상추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 5		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		공공기관 에너지이용합리화 추진
추진개요		❍ 사업내용 - ‘10년 에너지이용합리화 실시계획 수립 - ‘09년 에너지절약 추진실적 제출(지식경제부) - ‘10년 공공기관 에너지이용합리화 추진실태 점검 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ ‘10. 3월 : 2010년도 에너지이용합리화 실시계획 수립 ❍ ‘10. 4월 : 2009년도 공공기관 에너지절약 추진실적 제출 ❍ ‘10. 9월 : 상반기 공공기관 에너지이용합리화 추진실태 점검 ❍ ‘10. 12월 : 하반기 공공기관 에너지이용합리화 추진실태 점검
향후계획		❍ 공공기관 에너지이용합리화 지속 추진
성과	목표	❍ 에너지이용합리화 실시계획 수립 ❍ 에너지절약 추진실적 제출(지식경제부) ❍ 에너지이용합리화 추진실태 점검 : 2회
	성과	❍ ‘10. 3월 : 에너지이용합리화 실시계획 수립 ❍ ‘10. 4월 : 에너지절약 추진실적 제출(지식경제부) ❍ 에너지이용합리화 추진실태 점검 : 2회 64개소
	기대효과	❍ 공공기관 에너지이용효율 증대 ❍ 신․재생에너지설비 보급 촉진
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 공공기관 에너지이용합리화 계획에 의거 목표대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 6		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		공공기관 청사 에너지 절감
추진개요		❍ 사업내용 - 공공기관 청사 에너지 정밀진단 실시 - 공공기관 청사 에너지 절감 목표설정 및 달성추진 - 에너지 절감 목표달성을 위한 자문회의 운영 ❍ 사 업 비 : 200백만원 (에너지사업기금)
추진실적		❍ 3-3-7. 공공기관 에너지절감 목표관리제 추진과 중복으로 취소
향후계획		❍ 없음
성과	목표	❍ 없음
	성과	❍ 없음
	기대효과	❍ 없음
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			● 취소			〇 재검토	〇 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 3-3-7. 공공기관 에너지절감 목표관리제 추진과 중복으로 취소

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 7		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		공공기관 에너지절감 목표관리제 추진
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 225개 기관 (시, 군․구, 공사․공단) - 목표 : 10% 이상(‘08～’09년도 평균 에너지사용량 대비) ❍ 사 업 비 : 200백만원 (에너지사업기금)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3월 : 2010 공공기관 에너지절감 목표관리제 종합 계획 수립 - ‘10. 6월 : 공공기관 건물 에너지 정밀진단 용역 착수 - ‘10. 9월 : 공공기관 건물 에너지 정밀진단 용역 준공 - ‘10.11월 : 목표관리(에너지절감) 우수기관 선정․포상 ❍ 집 행 액 : 154백만원
향후계획		❍ ‘11년도 공공기관 에너지절감 목표관리제 추진
성과	목표	❍ 에너지절감 목표설정 : 1회 ❍ 에너지 정밀진단 : 1회 ❍ 에너지사용 실적 점검 : 3회
	성과	❍ 에너지절감 목표관리제 종합계획 수립 ❍ 에너지 정밀진단 실시 : 21개 기관 (에너지 사용량 100toe 이상 기관) ❍ 에너지사용 실적 점검 : 3회 89개 기관 (5%이상 증가 기관) ❍ 우수기관 표창 : 3개 기관, 공무원 5명
	기대효과	❍ 에너지 정밀진단을 통한 효율적인 에너지 절약 추진 ❍ 에너지 절약을 통한 온실가스 배출 저감 및 에너지 예산절감
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 공공기관의 에너지절감 목표관리제를 계획에 의거 목표대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 8		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		사회복지시설 태양열 급탕설비 설치
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 사회복지시설 23개소 - 용량 : 집열면적 988㎡ ❍ 사 업 비 : 910백만원 (국 455, 시 228, 군구 227)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4. : 실시설계 완료 - ‘10. 5. : 시설공사 착공 - ‘10. 8. : 시설공사 준공 ❍ 집 행 액 : 747백만원
향후계획		❍ 사회복지시설 태양열 설치 지속실시
성과	목표	❍ 실시설계 완료 ❍ 태양열 급탕시설 설치
	성과	❍ 실시설계 완료 ❍ 태양열 급탕시설 설치 : 사회복지시설 23개소, 988㎡
	기대효과	❍ 사회적 약자에 대한 에너지 복지 증진 ❍ 태양열을 통한 신․재생에너지 발생으로 에너지 절감
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 사회복지시설 태양열 급탕설비 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 9		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		그린-홈(태양광․태양열) 지원사업 추진
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 관내 단독주택 173가구(태양광 123, 태양열 50) - 용량 : 태양광 3kw/가구, 태양열 30㎡/가구 ❍ 사 업 비 : 400백만원
추진실적		❍ 추진실적 : 157가구 설치완료 - 태양광 105가구, 태양열 52기구 ❍ 집 행 액 : 375백만원
향후계획		❍ 그린-홈(태양광․태양열) 지원사업 지속 추진
성과	목표	❍ 그린-홈(태양광․태양열) 지원 : 173가구
	성과	❍ 그린-홈(태양광․태양열) 설치완료 : 157가구 - 태양광 105가구, 태양열 52가구
	기대효과	❍ 가정내 태양광․태양열 설비 보급 확대로 신재생에너지 정책 참여유도
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 그린-홈(태양광․태양열) 지원사업을 계획대로 정상적으로 설치 완료

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 10		구 분	녹색건축물			추진부서		사회복지봉사과
사 업 명		사랑의 집 고치기 범시민 참여 사업
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘09 ～ ’12년 - 대상 : 홀몸노인, 소년소녀가장, 장애인, 한부모가정 가구 등 - 내용 : 건설기업 등의 집고치기 시공, 기자재 기부, 자원봉사 단체의 활동을 통하여 소외계층의 집을 무료로 개․보수 ❍ 사 업 비 : 500백만원(민자)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4. 1 : 사랑의 집 고치기 사업 참여 협약체결(현대제철) - ‘10. 8. 25 : 사랑의 집 고치기 사업 참여 협약체결(대림산업) - ‘10. 12. 30 : 집고치기 총 671가구 완료 (2009년 150가구, 2010년 521가구) ❍ 집 행 액 : 500백만원
향후계획		❍ 사랑의 집 고치기 범시민 참여 사업 지속 추진
성과	목표	❍ 기업 등 집고치기 참여 : 15개사(단체) ❍ 집고치기 기부금 모금 : 200백만원 ❍ 집고치기 시공 : 500가구
	성과	❍ 기업 등 집고치기 참여 : 16개사(단체) ❍ 집고치기 기부금 모금 : 161백만원 ❍ 집고치기 시공 : 521가구
	기대효과	❍ 저소득층과 소외계층 이웃들의 집을 기업의 사회공헌 활동이나 자원봉사자들의 참여로 무료로 고쳐 주는 사업으로 나눔과 기부문화 확산에 기여
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 사랑의 집 고치기 범시민 참여 사업을 계획대로 정상적으로 추진 ❍ 많은 기업 및 자원봉사 단체의 참여방안 마련 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 11		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		신⋅재생에너지 시설 확충
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 공공하수처리장(옹진), 소래습지생태공원, 강화사업소(인천환경공단) - 내용 : 태양광 발전설비 설치 - 규모 : 발전용량 220kw(70kw, 100kw, 50kw) ❍ 사 업 비 : 1,899백만원 (국 1,065, 시 648, 군구 186)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 5월 : 공공하수처리장(옹진군) 태양광 발전설비 실시설계 완료 - ‘10. 8월 : 소래습지생태공원 태양광 발전설비 실시설계 완료 - ‘10. 8월 : 공공하수처리장(옹진군) 태양광 발전설비 설치 완료 - ‘10. 12월 : 소래습지생태공원 태양광 발전설비 설치 완료 ❍ 집 행 액 : 1,670백만원
향후계획		❍ 강화사업소 태양광 발전설비 설치
성과	목표	❍ 공공하수처리장(옹진군) 태양광 발전설비 설치 ❍ 소래습지생태공원 태양광 발전설비 설치
	성과	❍ 공공하수처리장(옹진군) 태양광 발전설비 설치 완료(70kw) ❍ 소래습지생태공원 태양광 발전설비 설치 완료(100kw)
	기대효과	❍ 공공기관이 신⋅재생에너지 시책 선도 ❍ 온실가스 감축 136tCO2/년, 에너지 절감 298,716kwh/년
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 공공하수처리장(옹진군) 및 소래습지생태공원 태양광 설치 사업을 계획대로 정상적으로 설치완료

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 3 - 12		구 분	녹색건축물			추진부서		신성장동력과
사 업 명		태양광 발전 시범사업 설치
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 시청사 민원동 옥상 - 규모 : 발전용량 56kw ❍ 사 업 비 : 500백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 6월 : 관급자재 구매 및 설치공사 계약 - ‘10. 7월 : 태양광 발전설비 설치 완료 ❍ 집 행 액 : 425백만원
향후계획		❍ 태양광 발전설비 유지관리
성과	목표	❍ 태양광 발전설치 설치(56kw)
	성과	❍ 시청사 민원동 옥상에 태양광 발전설치 설치 완료 (56kw)
	기대효과	❍ 저탄소 녹색성장의 선도적인 추진 이미지 구축 및 신⋅재생에너지 보급 확대
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 태양광 발전설비는 계획대로 정상적으로 설치 완료 ❍ 태양광 발전설비 운영에 따른 성과 조사 및 공공기관 확대 시행

단위사업별 점검․평가표
관리번호	3 - 3 - 13	구 분	녹색건축물	추진부서	자원순환과
사 업 명	바이오매스 발전사업
추진개요	1. 음⋅폐수 바이오가스화 시설 ❍ 사업내용 - 기간 : ‘09 〜 ’12 - 내용 : 음⋅폐수 등 유기성폐기물을 바이오가스(메탄가스)로 에너지화 - 규모 : 500톤/일 ❍ 사 업 비 : 11,505백만원 (국 2,752, 지방비 8,753) * 지방비는 서울⋅인천⋅경기 분담금, 인천시 부담 1,753백만원 2. 바이오가스 자동차 연료화 시설 ❍ 사업내용 - 기간 : ‘09 〜 ’10 - 내용 : 바이오가스(메탄가스)를 정제⋅압축⋅액화하여 연료화 - 규모 : 10㎥/min(충전차량 약 60대/일 규모) ❍ 사 업 비 : 4,790백만원 (국 750, 매립지공사 4,040)
추진실적	1. 음⋅폐수 바이오가스화 시설 ❍ 추진실적 - ‘10. 2. 22 : 음폐수 시설공사 공고(조달청) - ‘10. 8. 10 : 전면책임감리용역 착수계 제출 및 계약체결 - ‘10. 9. 8 : 동서발전 5MW 가스터빈 협약체결 - ‘10. 9. 9 : 우선시공분 계약체결 - ‘10. 9. 20 : 착수계 제출(우선시공분) - ‘10. 12. 20 : 실시설계도서 납품 ❍ 집 행 액 : 11,505백만원 2. 바이오가스 자동차 연료화 시설 ❍ 추진실적 - ‘09. 12. 22 : 1차분 계약체결 및 착공 - ‘10. 3. 18 : 1차분 공사기간 연장 (‘10.3.22 →’10.6.30) - ‘10. 4. 30 : 2차분 공사계약 ❍ 집 행 액 : 4,790백만원

향후계획		1. 음⋅폐수 바이오가스화 시설 : 시설공사 추진 2. 바이오가스 자동차 연료화 시설 : 운영
성과	목표	1. 음⋅폐수 바이오가스화 시설 : 시설설계 완료 및 착공 2. 바이오가스 자동차 연료화 시설 : 시설완료
	성과	1. 음⋅폐수 바이오가스화 시설 : 시설설계 완료 및 착공 2. 바이오가스 자동차 연료화 시설 : 시설완료 - 10㎥/min(충전차량 약 60대/일 규모)
	기대효과	1. 음⋅폐수 바이오가스화 시설 ❍ 2013년 음․폐수 해양배출 규제에 따른 처리대책 마련 ❍ 화석연료 대체에너지 생산에 따른 온실가스 저감효과 2. 바이오가스 자동차 연료화 시설 ❍ 대체에너지를 통한 온실가스 감축으로 지구온난화 방지기여 ❍ 연간 약 30억원의 경제가치 창출
결 과			계 획 변 경		추 진 결 과
			〇 취소	〇 재검토	〇 완료	● 정상	〇지연/미흡
평가결과		❍ 음⋅폐수 바이오가스화 시설은 계획대로 추진중이며, 바이오가스 자동차 연료화 시설은 정상적으로 설치완료

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 4 - 1		구 분	녹색공간			추진부서		물관리과
사 업 명		하천재해 예방사업
추진개요		❍ 사업내용 - 선행천 수해상습지 개선사업(하도정비, 교량정비 등) - 삼동암천 수해상습지 개선사업(제방확장, 교량, 배수문 등) ❍ 사 업 비 : 8,000백만원 (국 5,500, 시 2,500)
추진실적		❍ 추진실적 - 선행천 ⋅‘10. 3. 30 : 지방하천관리위원회 심의(조건부 가결) ⋅‘10. 12 : 기본계획 및 실시설계 중(현 공정 99%) - 삼동암천 ⋅‘10. 4. 14 : 지적 분할 및 공부정리 완료 ⋅‘10. 6. 24 : 보상계획 열람ㆍ공고 ⋅‘10. 7 ~ : 보상 추진중 ❍ 집 행 액 : 6,016백만원 (잔액 보상 추진중)
향후계획		❍ 선행천 - ‘11. 1. : 실시설계 완료 및 사업 시행계획수립 - ‘11. 2. : 지적 분할 및 공부정리 - ‘11. 7. : 보상액 산정 및 개별통보 ❍ 삼동암천 - ‘11. 3 : 계약체결 및 공사 착공
성과	목표	❍ 선행천 수해상습지 개선사업 행정절차이행, 보상, 공사착공 ❍ 삼동암천 수해상습지 개선사업 행정절차이행, 공사착공
	성과	❍ 선행천 수해상습지 개선사업 행정절차이행 ❍ 삼동암천 수해상습지 개선사업 행정절차이행, 보상추진중
	기대효과	❍ 자연생태계 복원 및 친숙하고 쾌적한 시민생활 도모
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 수해상습지 개선사업 위한 행정절차 이행 및 보상을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 4 - 2		구 분	녹색공간			추진부서		환경정책과
사 업 명		생태통로 및 녹지축 연결
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘07 〜 ’13 - 규모 : 생태통로 2, 아치교 2, 출렁다리 1, 녹도 6 ❍ 사 업 비 : 4,500백만원 (국 3,048, 시 1,101, 군구 351)
추진실적		❍ 추진실적 《원적산길 생태통로 건설》 - ‘10. 4. 6 : 원적산길 생태통로 건설사업 추진계획 변경수립 - ‘10. 9. 3 : 공사 착공 《주안산길 산지연결아치교 설치》 - ‘10. 2. 16 : 주안산길 산지연결다리 설치계획 수립 - ‘10. 2 ~ 5 : 보상 협의 - ‘10. 11. 30 : 토지 보상 완료 《승기천변 녹도 조성》 - ‘10. 6. 23 : 공사 착공 - ‘10. 12. 19 : 공사 준공 ❍ 집 행 액 : 3,459백만원 (잔액 계속비 이월)
향후계획		❍ 생태통로, 아치교, 녹도, 출렁다리 공사시행
성과	목표	❍ 원적산길 공사착공 ❍ 주안산길 산지연결 아치교 설치에 따른 보상완료 ❍ 승기천변 녹도 준공
	성과	❍ 원적산길 생태통로 공사착공(‘10. 9. 3) ❍ 주안산길 산지연결 아치교 설치에 따른 보상완료(‘10. 11. 30) ❍ 승기천변 녹도 준공(‘10. 12. 29)
	기대효과	❍ 생태통로 조성․녹지축 연결로 자연 생태 복원 및 등산로 연결에 따른 여가선용의 기회 제공
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 생태통로 및 녹지축 연결사업을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 4 - 3		구 분	녹색공간			추진부서		물관리과
사 업 명		철새와 함께하는 도심하천 가꾸기
추진개요		❍ 사업내용 - 유수지 친수 공간 조성사업 추진 ․남동유수지 친수 공간 조성 (규모 : 749,554㎡) ․인천교․석남유수지 친수 공간 조성 (규모 : 189,541㎡) ❍ 사 업 비 : 582백만원 (국 532, 시 50)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4 ～ 10 : 인천교․석남유수지 친수공간조성 타당성 용역 준공 - ‘10.10 : 남동유수지 친수공간 조성 기본 및 실시설계비 추경확보 ❍ 집 행 액 : 82백만원 (잔액 이월)
향후계획		❍ 남동유수지 기본 및 실시설계 용역 준공
성과	목표	❍ 남동유수지 친수공간 실시계획 준공 ❍ 인천교․석남유 유수지 타당성 조사
	성과	❍ 인천교․석남유수지 친수공간조성 타당성 용역 완료
	기대효과	❍ 오염된 하천에서 명품하천으로 변모 ❍ 시민과 함께하는 거버넌스 행정 구현
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		〇 정상		●지연/미흡
평가결과		❍ 인천교․석남유수지 친수공간조성 타당성 용역은 계획대로 정상적으로 완료 ❍ 남동유수지 친수공간 조성 기본 및 실시설계는 재정여건으로 사업비 확보 지연에 따른 사업 지연

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 4 - 4		구 분	녹색공간			추진부서		항만공항시설과
사 업 명		경인 아라뱃길 사업
추진개요		❍ 사업내용 - 주운수로 18㎞, 터미널 245만㎢, 갑문 2기, 교량 8개소 - 수변 공간 친수경관 조성사업 - 주변지역 개발계획 수립 ※ 사업시행자 : 한국수자원공사 ❍ 사 업 비 : 777,600백만원 (민자)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3. 10 : 경인아라뱃길 실시계획 변경(2차) 승인 고시 - ‘10. 6. 4 : 수변공간 친수경관 조성사업 착수 - ‘10. 9. 2 : 경인항 부두 운영예정사 선정 완료 - ‘10. 12월 : 경인아라뱃길 건설공사 62% 완료 ❍ 집 행 액 : 658,100백만원 (잔액 이월)
향후계획		❍ ‘11. 10 : 경인 아라뱃길사업 완료
성과	목표	❍ 경인아라뱃길 건설 및 수변공간 친수경관 조성공사 추진
	성과	❍ 경인아라뱃길 건설 공정 62% (‘11. 10월 준공 예정) ❍ 수변공간 친수경관 조성사업 착수(‘10. 6. 4)
	기대효과	❍ 굴포천 유역의 홍수피해 방지 ❍ 물류비 절감, 교통난 완화 및 녹색성장 기여 ❍ 문화, 관광, 레저 등 다양한 시너지 효과 창출
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 민자사업인 경인아라뱃길 사업은 ‘11년도 준공 목표로 계획대로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 5 - 1		구 분	녹색공간			추진부서		옹진군
사 업 명		푸른 벗말 조성
추진개요		❍ 사업내용 - 테마마을 체험공간조성 보완사업 : 1개소(9월~12월) - 농촌체험프로그램 기술보급사업 : 1개소(3월~12월) - 체험마을 사무장 채용 : 1명(1월~12월) - 테마마을 주민 현장교육 : 1회(8월) ❍ 사 업 비 : 238백만원 (국 17, 시 3, 군 217, 민자 1)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1. 1 : 마을사무장 채용(1명) - ‘10. 2. 19 : 농촌체험프로그램 기술보급사업 사업 착수 - ‘10. 8월 : 주민 현장교육 실시(1회 30명) - ‘10. 12. 23 : 체험공간조성 보완사업 완료 ❍ 집 행 액 : 238백만원 (잔액 이월)
향후계획		❍ 마을 사무장 채용(년 단위 계약) 및 테마마을 운영
성과	목표	❍ 그린 체험마을 운영 : 615명
	성과	❍ 그린 체험마을 운영 : 752명
	기대효과	❍ 지역주민 소득증대 및 주민 간에 화합․협동하는 분위기 조성 ❍ 농업․농촌의 정취를 느끼게 하고, 도농교류 활성화
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 농촌 체험마을 조성 및 운영을 계획대로 정상적으로 추진 ❍ ‘11년도 주민교육, 새로운 체험프로그램 개발, 여객운임 지원 등의 예산 미확보에 따른 어려움 예상

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 5 - 2		구 분	녹색공간			추진부서		농업기술센터
사 업 명		무의도 까치놀섬마을 조성
추진개요		❍ 사업내용 - 체험객맞이 시범운영 : 10회 400명 - 내 용 : 농촌전통문화체험, 홍보물제작 배부 등 ❍ 사 업 비 : 21백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4. 14 ~ 4. 17 : 조팝나무 등 14종 2,392주 식재 및 관리 - ‘10. 5. 24 : 호박, 박 넝쿨터널 조성 (2동 : 66㎡) - ‘10. 2. 19 ~ 12. 22 : 체험객맞이 66회 2,166명 ❍ 집 행 액 : 14백만원 (잔액 이월)
향후계획		❍ 체험객 맞이 지속 추진
성과	목표	❍ 체험객 맞이 : 10회 400명
	성과	❍ 체험객 맞이 : 66회 2,166명
	기대효과	❍ 농업․농촌생활에 대한 체험기회 제공을 통하여 이해증진 ❍ 농업의 어메니티 자원을 활용한 새로운 일자리 창출
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 농업․농촌생활 체험운영을 목표이상으로 운영

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 5 - 3		구 분	녹색공간			추진부서		농업기술센터
사 업 명		Green 시민 관광농원 조성
추진개요		❍ 사업내용 - 그린스쿨 운영을 위한 교육관, 체험실습관 설치 및 경관조성 ․기반시설(체험연동하우스, 교육관 등) 및 화목류, 초화류 식재 ․전문자문기관의뢰 컨설팅 및 우수관광농원 벤치마킹 ❍ 사 업 비 : 346백만원 (시 200, 민자 133)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4 ~12 : 그린시민 관광농원 조성 용역 - ‘10. 5 ~ 6 : 넝쿨터널 조성 : 100m - ‘10. 5 ~12 : 체험교육 무기둥 2연동 하우스 1개소 992㎡ - ‘10. 5 ~12 : 온실(향기원) 8연동 하우스 1개소 4,320㎡ - ‘10. 7 ~11 : EM(친환경) 교육관 시설 : 99㎡ ❍ 집 행 액 : 346백만원 (13백만원 민자 별도 추가부담)
향후계획		❍ 경관조성, 안내판 설치, 체험연동하우스 시설, 에너지 정원 시설(태양광, 풍력 등)
성과	목표	❍ 교육관 및 체험하우스 시설 ❍ 경관조성
	성과	❍ 체험실습관 2개소, 교육관 1개소 설치 - 무기둥 2연동 하우스(992㎡), 온실(향기원) 8연동 하우스(4,320㎡), EM(친환경) 교육관 시설(99㎡) ❍ 넝쿨터널 조성 완료 : 100m
	기대효과	❍ 시민, 학생을 대상으로 친환경 교육을 통한 저탄소 녹색산업 공감대 형성 및 인식 제고
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		●정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 저탄소 녹색산업 확대를 위한 Green 시민 관광농원 조성사업을 계획대로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 5 - 4		구 분	녹색공간			추진부서		물관리과
사 업 명		철새와 함께하는 친수 공간 조성
추진개요		❍ 사업내용 - 오수하천유입 원천적 차단 - 조류서식처 조성(갈대숲), 수초섬 식생대 조성 - 식물부유섬 설치, 차폐녹지 조성, 모니터링 실시 ❍ 사 업 비 : 3,400백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1. 22 : 철새와 함께하는 생태하천 관리계획 수립 - ‘10. 3.~12 : 자연형 하천 및 용현갯골수로 모니터링 시행 - ‘10. 5. : 율도사업소 수목 갯골유수지 이식 - ‘10. 7 : 1사 1하천 가꾸기 운동 협약식 개최 - ‘10. 9 : 굴포천갈대, 억새풀, 초화류, 관목류 보강식재 - ‘10.11 : 2011년 생태하천 종합관리계획 수립 시달(군․구) ❍ 집 행 액 : 3,400백만원
향후계획		❍ 초화류․갈대 등 식재, 불법 경작․쓰레기 투기 단속 등 하천 유지관리상태 지속 관리
성과	목표	❍ 친수공간 조성
	성과	❍ 친수공간 조성 - 율도사업소 수목 갯골유수지 해송외 10종 227주 이식 - 1사 1하천 가꾸기 운동 협약 : 29개사 참여 - 굴포천 갈대, 억새풀, 초화류, 관목류 255,000주 보강식재
	기대효과	❍ 시민과 새가 함께하는 친환경 생태도시 건설
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 모니터링, 수목 및 갈대, 초화류 식재 등 친수 공간 조성을 계획대로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 5 - 5		구 분	녹색공간			추진부서		강화군
사 업 명		석모도 수목원 조성사업
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘08. 1월 ～ ’11. 7월 - 위치 : 강화군 삼산면 석모리 산89번지 일원 - 면적 : 541천㎡ - 내용 : 산책로, 테마식물원, 수변생태 관찰지구, 자연 학습장 등 ❍ 사 업 비 : 1,900백만원 (국 900, 시 1,000)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘08. 12. 1 : 석모도 수목원 조성계획 승인 - ‘08. 12. 30 : 1차년도 착공(토목, 데크로드) - ‘09. 1. 29 : 2차년도 착공(건축) - ‘10. 1. 25 : 3차년도 착공(유리온실, 조경) - ‘10. 12월 : 전체 공정률 90%(건축, 토목분야 준공) ❍ 집 행 액 : 1,900백만원
향후계획		❍ 조경공사․생태체험 및 전시관 설치 완료 후, 시험운영을 통해 수목원 개장
성과	목표	❍ 수목원 조성사업 진행
	성과	❍ 수목원 조성사업 진행 : 공정율 90% (‘11. 11월 개장예정) - 토목, 데크로드, 건축, 유리온실 분야 준공 - 조경분야 공사중
	기대효과	❍ 시민들에게 자연보호, 자연보존의 산 교육장 제공 ❍ 수목, 식물전시에 의한 임학, 조경학 등 연구분야의 장소제공
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 수목원 조성사업은 계획대로 정상적으로 추진 ❍ 개장에 따른 진입도로, 주차장 등 준비 및 점검 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 5 - 6		구 분	녹색공간			추진부서		강화군
사 업 명		석모도 자연휴양림 조성사업
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘08. 01월 ～ ’11. 10월 - 위치 : 강화군 삼산면 석모리 산154-1번지 일원 - 면적 : 1,284천㎡ - 내용 ․1차지구 : 관리사무소, 식당, 산림문화 휴양관, 숲속 수련장, 다목적구장 등 ․2차지구 : 숲속의 집, 공중화장실, 야영장, 창고, 팔각전망대 등 ❍ 사 업 비 : 5,430백만원 (국 900, 시 495, 군 3,945)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4월 : 1차 지구 2차년도 공사 준공(건축) - ‘10. 2월 : 2차 지구 실시설계 준공 - ‘10. 4월 : 2차 지구 1차년도 공사착공 - ‘10. 12월 : 전체 공정률 50% ❍ 집 행 액 : 5,430백만원
향후계획		❍ 1차 및 2차 지구 준공, 전체 개장
성과	목표	❍ 1차, 2차 지구 공사 추진
	성과	❍ 1차, 2차 지구 공사 추진 : 전체 공정율 50% (‘11. 11월 개장예정)
	기대효과	❍ 시민의 보건휴양 및 정서 함양 ❍ 지역연계 관광 네트워크 활성화
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ ‘11년도 개장을 위하여 지연휴양림 조성사업을 계획대로 추진 ❍ 개장에 따른 진입도로, 주차장 등 준비 및 점검 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 5 - 7		구 분	녹색공간			추진부서		농식품유통과
사 업 명		경쟁력 제고를 위한 관광농촌 개발사업
추진개요		❍ 사업내용 - 농촌마을종합개발사업(선원권역, 불은권역) ․기간 : ‘07 ~ ’14 ․개요 : 복지농촌마을 조성, 관광인프라 확충, 교육 및 마을운영 지원 등 - 테마공원 조성사업(장화지구) ․기간 : ‘09 ~ ’12 ․개요 : ‘개울을 넘는 길’외 테마길 3개소 ❍ 사 업 비 : 4,001백만원 (국 2,401, 시 800, 군 800)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1. 12 : 불은권역 농촌마을종합개발사업 기본계획 승인 - ‘10. 9. 10 : 장화지구 테마공원 사업 주차장 부지 매입 - ‘10. 9. 14 : 선원권역 농촌마을종합개발사업 기본계획(2단계) 승인 - ‘10. 12. 1 : 불은권역 농촌마을종합개발사업 시행계획 승인 ❍ 집 행 액 : 4,001백만원
향후계획		❍ 장화지구 테마공원, 선원권역 2단계․불은권역 1단계 농촌마을종합개발 공사 착공 ❍ ‘11. 12월 : 선원권역 2단계 농촌마을종합개발 사업 준공
성과	목표	❍ 농촌마을 종합개발사업 및 테마공원 조성사업 추진
	성과	❍ 농촌마을 종합개발사업 및 테마공원 조성사업 추진 - 선원권역 기본계획 2단계 승인, 불은권역 시행계획 승인 ❍ 장화지구 주차장 부지 매입 완료
	기대효과	❍ 농촌다움의 유지, 보전 및 도시와 구별되는 농촌 특유의 자연, 문화자원을 토대로 도시민에게 휴식, 레저, 체험공간 제공
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 농촌의 경쟁력 제고를 위한 농촌마을 종합개발사업 및 테마공원 조성사업을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 5 - 8		구 분	녹색공간			추진부서		해양수산과
사 업 명		저탄소 친환경 녹색어업 육성
추진개요		❍ 사업내용 - 해조류(잘피, 김 등)양식 : 300책, 500드럼 - 친환경 갯벌(굴 등) 양식 및 저질개선 : 200ha - 환경개선사업(바지락 등) : 200ha - 친환경어장 생태 환경사업 : 60ha(200톤) ❍ 사 업 비 : 3,219백만원 (국 655, 시 1,420, 군 1,144)
추진실적		❍ 추진실적 - 해조류 양식 ․‘10.11월 : 김 양식시설 2개소(1,973책) 준공 ․‘10.12월 : 양식장 소독제 및 김 활성제 지원(500드럼) - 친환경 갯벌(굴 등) 양식 및 저질개선 ․‘10. 9월 : 굴 양식장 갯닦기 사업 완료(200ha) ․‘10.10월 : 굴양식 시설(846set) 지원 완료 - 환경개선사업 ․‘10. 8월 : 바지락 양식장 저질개선 4개소(200ha) 준공 ․‘10.12월 : 낚시터 환경개선사업 완료 - 친환경어장 생태 환경사업 ․‘10. 6월 : 양식어장 정화사업 2개소(60ha) 완료 ․‘10.12월 : 불가사리 수매 267톤 완료 ❍ 집 행 액 : 3,219백만원
향후계획		❍ 친환경 어업 육성사업 지속 추진
성과	목표	❍ 해조류 양식, 친환경 갯벌 양식, 환경개선사업 추진
	성과	❍ 해조류 양식 : 김 양식시설 2개소(1,973책) 준공 양식장 소독제 및 김 활성제 지원(500드럼) ❍ 친환경 갯벌(굴 등) 양식 및 저질개선 - 굴 양식장 갯닦기 사업 (200ha), 굴양식 시설(846set) 지원 완료 ❍ 환경개선사업 : 바지락 양식장 저질개선 4개소(200ha) 준공 ❍ 친환경어장 생태 환경사업 ․양식어장 정화사업 2개소(60ha), 불가사리 수매 267톤 완료
	기대효과	❍ 지속가능한 어장조성 및 어장환경 개선으로 어업인 소득증대 ❍ 자율관리 공동체를 통한 어입인 자율적인 자원과 바다환경 보존
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 어업인의 생산기반 구축, 소득증대 등을 위해 계획대로 친환경 녹색어업 육성 추진 ❍ 지구온난화에 따른 수산생물 서식환경 변화에 대한 대비 필요

단위사업별 점검․평가표
관리번호		3 - 6 - 1		구 분	녹색건축물			추진부서		환경정책과
사 업 명		그린 경영(기후 홈닥터) 추진
추진개요		❍ 사업내용 - 대상 : 지역 내 중소기업, 에너지 다소비 건물 등 25개 사업장 - 주관 : 인천상공회의소(실무네트워크 인력 pool 활용 4~5명) - 내용 : 온실가스 인벤토리 구축, 기술․에너지 효율향상, 경영 시스템 구축 지원, 건물 부문 에너지 관리기준 점검 등 ❍ 사 업 비 : 50백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3월 : 산업계 온실가스 감축사업 계획 수립 - ‘10. 5월 : 그린경영컨설팅 착수 - ‘10.12월 : (주)유니드 등 25개 업체 완료 ❍ 집 행 액 : 50백만원
향후계획		❍ 그린경영 컨설팅 지속 실시
성과	목표	❍ 그린경영 컨설팅 실시
	성과	❍ (주)유니드 등 25개 업체 그린경영 컨설팅 완료
	기대효과	❍ 기업의 자발적인 온실가스 감축 유도
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 인천상공회의소 실무네트워크 인력 pool를 활용하여 계획대로 컨설팅을 정상적으로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 1 - 1		구 분	녹색공간			추진부서		환경정책과
사 업 명		저탄소 녹색마을 조성사업
추진개요		❍ 사업내용 - 녹색마을 조성 기본계획 수립 ․사 업 명 : 인천지역 저탄소 녹색마을 조성방안 연구 ․기 간 : '10. 4월 ~ ‘10. 12월 ․용역수행자 : 인천지역환경기술개발센터 ․주요내용 : 인천지역 녹색마을 조성 가능지역 조사 및 실증 ❍ 사 업 비 : 100백만원 (국비)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3월 : 녹색마을 조성방안 포럼 - ‘10. 4월 : 녹색마을 조성 용역 착수 - ‘10. 12월 : 녹색마을 조성 용역 완료 ❍ 집 행 액 : 100백만원
향후계획		❍ 지역별, 도서별 바이오메스량 조사 등 녹색마을 적정지역 선정
성과	목표	❍ 인천지역 저탄소 녹색마을 조성방안 연구용역
	성과	❍ 인천지역 저탄소 녹색마을 조성방안 연구용역 완료
	기대효과	❍ 역사, 문화, 관광지와 어우러진 친환경 녹색마을 조성으로 에너지 자립도 제고
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 에너지 자립도 제고를 위한 녹색마을 조성방안 연구용역을 계획대로 정상 추진 ❍ 용역 결과에 따른 녹색마을 조성사업 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 1 - 2		구 분	녹색기반			추진부서		물관리과
사 업 명		하수처리수 재이용 인프라 확대(굴포천 유지용수 공급)
추진개요		❍ 사업내용 - 하수재처리시설 및 송수펌프장 Q=75,000㎥/일 설치 - 양정(H)=30m, 송수관로 (Φ900㎜) L=1.1km ❍ 사 업 비 : 1,056백만원 (국비)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2 : 기술심의, 재원협의 - ‘10. 4 : 기본 및 실시설계 용역 완료 ❍ 집 행 액 : 354백만원 (잔액 이월)
향후계획		❍ 하수 재이용시설 설치 재검토
성과	목표	❍ 하수 재이용시설 실시설계 완료 및 착공
	성과	❍ 하수 재이용시설 실시설계 완료
	기대효과	❍ 하천에 깨끗하고 안정적인 유지용수 공급 및 수자원의 효율적인이용 극대화 기여
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			● 재검토	〇 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 국비에 대한 시비매칭 미확보로 착공이 지연되고 있으나, ❍ 굴포하수처리장의 방류수 수질기준 강화로 총인저감시설이 설치예정임에 따라 예산중복 투자방지를 위해 재검토 (하수재이용시설→방류수 공급)

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 2 - 1		구 분	녹색공간			추진부서		대기보전과
사 업 명		공장지역 환경디자인 Eco Friendly Zone 조성
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘09 ~ ’10 - 대상 : 기업체 30개소 - 내용 : 공장담장 철거 등 녹화사업 시행으로 도시환경개선 및 기업의 환경개선 ❍ 사 업 비 : 754백만원(시 431, 민자 323)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1 : 공장담장 철거․녹화사업 추진 계획 수립 - ‘10. 2 : 공장담장 철거․녹화사업장 선정(13개소) * 동구 2, 남구 1, 남동구 4, 부평구 3, 서구 3개소 - ‘10. 12 : E. F Zone 공장담장 철거. 녹화사업 추진 완료 ❍ 집 행 액 : 754백만원
향후계획		❍ 없음
성과	목표	❍ 공장담장 철거․녹화사업 추진
	성과	❍ 공장담장 철거․녹화사업 13개소 완료(‘09년도에 17개소 완료)
	기대효과	❍ 공장지역의 부족한 녹지 확충으로 친환경도시 조성에 기여 ❍ 공장 이미지 개선 및 인접 기업에 담장 개선 확대 분위기 조성
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 공장담장 철거․녹화사업을 계획대로 정상 추진 ❍ 건물 및 옥상 녹화사업과 중복기능이 있어 향후 미 시행

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 2 - 2		구 분	녹색공간			추진부서		물관리과
사 업 명		장수천 생태하천 조성
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘06. 2 ～ ’13. 12 - 내용 ․축 제 공 : 절토(37,127㎥), 성토(45,978㎥) ․호 안 공 : 생태 호안 블럭(1,426㎥), 식생매트(1,436m), 돌 붙임(1,015m) ․구조물공 : 배수통문 4개소, 배수통관 3개소, 여울설치 ․포 장 공 : 황토포장(T=20) B=4m, L=2,401m ․조 경 공 : 쉼터 3개소, 식재이설, 식재심기 등 ❍ 사 업 비 : 500백만원(국)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘07. 12 : 실시설계 용역 완료 - ‘10. 2 : 하천기본계획(변경) 용역심의 신청 ❍ 집 행 액 : 미 집행(이월)
향후계획		❍ 지적분할 및 공부정리, 보상 추진
성과	목표	❍ 행정절차 이행 및 보상 추진
	성과	❍ 행정절차 이행
	기대효과	❍ 살아 숨쉬는 건강한 생태하천 조성으로 하천의 기능 복원 ❍ 시민이 걷고 즐길 수 있는 친수 공간 조성으로 삶의 질 향상
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 하천기본계획(변경) 수립 및 하천구역결정(변경) 고시 등 행정절차 이행을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 2 - 3		구 분	녹색건축물			추진부서		경기장조성과
사 업 명		친환경 에너지자립형 아시아게임 경기장 건설
추진개요		❍ 사업내용 - 2014 인천아시아경기대회 주요 8개 경기장 설계용역 추진 * 서구 주경기장, 문학수영장, 계양․남동․선학․십정․강화․송림 경기장 ❍ 사 업 비 : 499,933백만원(국 58,429, 시 441,504)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1 ~ 4 : 남동․계양․십정․선학․문학․송림․강화 경기장 설계 및 건설사업관리(CM) 용역 착수 - ‘10. 4 ~ 5 : 선학․십정․남동․계양․문학․송림경기장 신재생에너지 의무투자액 5% 기본설계 반영 - ‘10. 6 : 서구 주경기장 지열에네지 이용 기술 검토 완료 및 신재생에너지 의무투자액 5% 실시설계 적용 - ‘10. 6 : 기본설계 확정(남동․계양․십정․선학․문학․송림) - ‘10. 8 : 강화경기장 신재생 에너지 의무투자액 7% 기본설계 반영 - ‘10. 10 : 강화경기장 기본설계 확정 ❍ 집 행 액 : 388,344백만원 (계속비 이월)
향후계획		❍ 실시설계 용역 완료 및 공사 착수
성과	목표	❍ 침환경 에너지시스템 설계반영
	성과	❍ 8개 경기장 신재생에너지 의무투자액 5% 기본설계 반영 - 서구 주경기장, 문학수영장, 선학․십정․남동․계양․송림․강화 경기장 - 지열, 태양광, 태양열, 고효율기기, 우수재활용, 자전거시스템, 자연채광, 쿨튜브, 절수형위생기기
	기대효과	❍ 환경 친화형 태양에너지 사용으로 석유수입 대체효과 및 신․재생에너지의 홍보 및 교육효과 제고
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 기본 및 실시설계에 신․재생에너지 의무투자액 5%를 8개 경기장에 계획대로 반영

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 2 - 4		구 분	녹색공간			추진부서		항만공항정책과
사 업 명		인천항 클린포트 조성사업
추진개요		❍ 사업내용 - 부두지역 : 노후시설 정비, 미관개선 등 - 주변지역 : 담장허물기, 미관담장 설치, 가로화단정비 등 ❍ 사 업 비 : 900백만원(시 450, 구 250, 민자 200)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1 ~ 9월 : 담장정비 - ‘10. 1 ~ 9월 : 미관 색채디자인 도색 - ‘10. 1 ~ 11월 : 기타 환경개선사업 추진 ❍ 집 행 액 : 900백만원
향후계획		❍ 담장정비, 가로정비, 녹지정비, 미관정비 지속 추진
성과	목표	❍ 가로정비 4,000m, 담장정비 800m ❍ 녹지조성 : 15,000㎡ ❍ 미관색체디자인 도색 : 3개소
	성과	❍ 가로정비 4,000m, 담장정비 800m ❍ 녹지조성 : 15,000㎡ ❍ 미관색체디자인 도색 : 3개소
	기대효과	❍ 도시성장과 시민수요에 부응하는 시민친화적인 항만 조성
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 항만도시 이미지 구축을 위한 담장정비, 가로정비, 녹지정비, 미관정비 사업을 계획대로 반영 * 추가사업은 지속적으로 도출되고 있으나, 시 재정여건 악화로 사업비 확보 어려움

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 2 - 5		구 분	녹색공간			추진부서		해양수산과
사 업 명		깨끗한 인천 앞바다 만들기
추진개요		❍ 사업내용 - 인천앞바다 쓰레기 수거･처리사업 ․부유･침적･해안쓰레기, 해양폐기물 수거(수매) 및 처리 ․해양환경정화선 및 청소선 운영･관리 ❍ 사 업 비 : 8,663백만원(국 3,028, 시 5,635)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1월 : 인천 앞바다 쓰레기수거사업 실시설계 준공 - ‘10. 2월 : 군․구 해안쓰레기 수거사업 착수 - ‘10. 5월 : 해양, 침체어망 인양 및 정화사업 착수 - ‘10.12월 : 현재 추진실적 : 8,244톤 ․바다쓰레기(침적, 부유, 중층) 처리 : 2,032톤 ․군․구 해안쓰레기 수거사업 : 6,087톤 ․해양정화선 이용 쓰레기 수거처리 : 125톤 - ‘10.12월 : 해양환경정화선 운영 143일 ❍ 집 행 액 : 8,650백만원
향후계획		❍ 인천 앞바가 부유․중층․침적 쓰레기 처리사업 지속 추진
성과	목표	❍ 인천 앞바다 쓰레기 수거․처리 ❍ 해양환경 정화선 운영
	성과	❍ 인천 앞바다 쓰레기 수거․처리 : 8,244톤 - 바다쓰레기(침적, 부유, 중층) 처리 : 2,032톤 - 군․구 해안쓰레기 수거사업 : 6,087톤 - 해양정화선 이용 쓰레기 수거처리 : 125 ❍ 해양환경 정화선 운영 : 143일
	기대효과	❍ 바다쓰레기 수거･처리를 통한 깨끗한 인천앞바다 조성으로 명품 해양도시 이미지 제고 및 녹색성장 기여
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 천안함 및 연평도 포격 사건 속에서도 계획대로 정상적으로 쓰레기 수거․처리

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 3 - 1		구 분	녹색교통			추진부서		교통기획과
사 업 명		첨단 교통관리시스템 구축
추진개요		❍ 사업내용 - 구간 : 남동로, 경원로, 경인로, 인주로, 백범로 및 주변도로 - 내용 : 수집․분석시스템 1식, 레이저검지기 78대, VMS 6기, CCTV 5기, 루프검지기 31개, 통신만 18km ❍ 사 업 비 : 4,000백만원(국 2,000, 시 2,000)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 7. 27 : 센터시스템 및 현장설비 설치공사 준공 - ‘10. 10 ~ 12 : 교통운영개선사항 사후평가 - ‘10. 12 : 2011년도 사업계획서 수립 ❍ 집 행 액 : 4,000백만원
향후계획		❍ 첨단 교통관리시스템 구축사업 시행 및 준공
성과	목표	❍ 센터시스템 구축 및 현장시스템 설치
	성과	❍ 센터시스템 구축 및 현장시스템 설치 준공(‘10. 7. 27) - 수집․분석시스템 1식 - 현장설비 : 레이져검지기 78대, 가변안내전광판 6기, CCTV 5기, 루프검지기 31개, 통신망 18km
	기대효과	❍ 교통 혼잡으로 인한 사회적비용 절감과 차량지체로 발생하는 대기오염․소음공해 저감으로 『저탄소 녹색교통』추구
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 센터시스템 구축 및 현장설비를 계획대로 설치 완료

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 3 - 2		구 분	녹색교통			추진부서		교통기획과
사 업 명		수도권 광역버스정보시스템 구축
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘10. 6. 9 ~ ’11. 2. 4 - 내용 : 정류소 안내기 100개소, 센터 시스템 1식 ❍ 사 업 비 : 1,500백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2. : 사업 공동 추진을 위한 행정협정서 체결 - ‘10. 3. : 정류소 안내기 설치대상 지역 현장조사 - ‘10. 6. 9 : 사업 착공(100개소) - ‘10. 7. : 도로굴착(점용) 인․허가 신청 - ‘10. 12. : 2011년도 사업계획서 수립 ❍ 집 행 액 : 1,000백만원(잔액 이월)
향후계획		❍ ‘11. 2월 구축사업 시험운행 및 준공
성과	목표	❍ 센터시스템 구축 및 장류소 안내기 구축 추진
	성과	❍ 센터시스템 및 장류소 안내기 구축사업 착공 - 정류소 안내기 100개소, 센터 시스템 1식
	기대효과	❍ 실시간 버스운행정보 제공으로 이용시민 편의 도모 ❍ 운행 정시성 향상으로 대중교통 이용활성화
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 수도권 광역버스정보시스템 구축사업을 ‘11. 2월 목표로 정상적으로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 3 - 3		구 분	녹색교통			추진부서		도로과
사 업 명		저탄소 녹색도로 환경조성
추진개요		❍ 사업내용 - 위치 : 부평역, 주안역 일원 - 내용 : 지중화, 인도확보, 보행자 안전시설물, 차도개선 등 ❍ 사 업 비 : 3,870백만원 (국 1,935, 시 1,935)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘09. 11 : 부평역 역세권주변 보행환경 조성사업 착공 - ‘10. 6 : 주안역 일원 보행환경 1단계 조성사업 착공 - ‘10. 10 : 주안역 일원 보행환경 1단계 조성사업 준공 ❍ 집 행 액 : 1,422백만원 (잔액 이월)
향후계획		❍ 부평역 및 주안역 일원 보행환경 조성사업 준공
성과	목표	❍ 부평역 역세권 일원 공사 ❍ 주안역 일원 설계용역 완료 및 공사
	성과	❍ 부평역 역세권 일원 공사중(‘11. 6월 준공예정) ❍ 주안역 일원 설계용역 완료 및 1단계 공사완료(A=42.9a)
	기대효과	❍ 안전한 보행환경조성 및 특색 있는 거리조성으로 쾌적한 환경과 깨끗한 인천의 명품도시 이미지 제고
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 부평역 및 주안역 일원 보행환경 조성사업을 계획대로 장상 추진 ❍ 한전의 한전주 지중화 사업이 조기 완료토록 적극 협의하여 계획기간내 사업이 완료되도록 조치

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 1		구 분	녹색교통			추진부서		도로과
사 업 명		자전거 전용도로 건설
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : 2009. 7 ～ 2010. 12 - 규모 : 7개 권역 34개노선 (L=88 ㎞) - ‘10년도 사업 : 계양구 1개 노선 1.5km ❍ 사 업 비 : 1,350백만원 (국 877<분권교부세>, 시 473)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1월～4월 : 자전거도로 교통체계 개선사업 - ‘10. 12월 : 자전거이용시설 실시설계(2단계) 용역 완료 - 계양구 1개 노선 1.5km 사업비 지원 ❍ 집 행 액 : 1,350백만원
향후계획		❍ 계양구 1개 노선 1.5km 준공
성과	목표	❍ 자전거 도로 확충
	성과	❍ 자전거 이용시설 실시설계(2단계) 용역 완료 ❍ 계양구 1개 노선 1.5km 공사 중(‘11. 3월 준공예정)
	기대효과	❍ 자전거 전용도로 확충으로 자전거이용 활성화 정착 ❍ 자전거 이용활성화로 시민들의 건강과 삶의 질 향상
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 계양구 자전거 도로 1.5km 건설을 ‘11. 3월 준공목표로 정상적으로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 2		구 분	녹색교통			추진부서		도로과
사 업 명		자전거 타기 및 안전교육 확대
추진개요		❍ 사업내용 - 체험 및 실습 교육 - 자전거 시책 교육 - 시민자전거 교육장 설치 운영 - 자전거 전문 지도자 양성 ❍ 사 업 비 : 10백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1. 26 : 문학경기장내 시민자전거교육장 건립계획 수립 - ‘10. 2. 8 : 2010인천광역시 자전거이용 활성화 사업계획 수립 - ‘10. 3. 19 : 2010년도 시민자전거교육장 운영계획 수립 - ‘10. 3. 29 : 문학경기장 임시자전거교육장 준공 - ‘10. 6. 7 : 자전거이용 촉진을 위한 리플렛 제작․배부 ❍ 집 행 액 : 10백만원
향후계획		❍ 자전거 타기 및 안전교육 확대
성과	목표	❍ 문학경기장 임시 자전거교육장 준공 ❍ 자전거이용 촉진을 위한 리플렛 제작․배부
	성과	❍ 문학경기장 임시 자전거교육장 준공 - 교육장 : 가설건물 2층, 연면적 440㎡ - 실외 체험장 및 광장 : 3,280㎡ ❍ 자전거이용 촉진을 위한 리플렛 100,000부 제작․배부
	기대효과	❍ 자전거이용활성화로 시민의 삶의 질 향상
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 문학경기장 임시 자전거교육장 준공 및 홍보물 제작․배포를 예산범위 내에서 정상적으로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 3		구 분	녹색교통			추진부서		도로과
사 업 명		도심형 자전거 보급
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘09. 12월 ～ ’11. 12월 - 규모 : 15,000대 (‘10년 5,000대, ’11년 10,000대) ❍ 사 업 비 : 500백만원
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2. 3 ∼ 3. 24 : 사업자 공모 - '10. 3. 23 : 인천교통공사와 자전거이용 활성화사업 위∙수탁 협약서 체결통보 - '10. 6. 30 : 도심형자전거보급사업자 최종선정 통보 - '10. 11. 11 : 인천시 도심형자전거 보급사업 협약 체결 - '10. 12. 21 : 도심형자전거 명칭 선정(미추누리) - '10. 12. 21 : 원가분석 심의 위원회 개최 ❍ 집 행 액 : 500백만원
향후계획		❍ 도심형 자전거 보급 : 13,000대
성과	목표	❍ 도심형 자전기 보급 : 5,000대
	성과	❍ 인천시 도심형자전거 보급사업 협약 체결 ❍ 도심형자전거 명칭 선정(미추누리)
	기대효과	❍ 좋은 품질의 자전거를 저가로 공급함으로서 자전거이용율 제고 ❍ 저탄소 녹색성장을 위한 교통수단으로서 역할 제고
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		〇 정상		●지연/미흡
평가결과		❍ ‘11. 3. 10부터 보급하고 있음(13,000대 보급예정)

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 4		구 분	녹색교통			추진부서		도로과
사 업 명		지하철 자전거 탑승시설 설치
추진개요		❍ 사업내용 - 인천메트로(29개역) 환승할인 시스템 구축 - 도심형자전거 전용 보관함 설치 (29개역 580대) - 지하철 역사 자전거 이동로 설치 (4개역) - 자전거 전용 게이트 설치 (10통로) - 전동차 개조 (24편성 48량) - 열차 내 자전거 휴대 확대 ❍ 사 업 비 : 250백만원 (민자)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4. 20 : 지하철 12개 역사 자전거 이동로 설치 완료 - ‘10. 5. 1 : 열차 내 자전거 휴대탑승 확대실시(’10. 5. 1(토) 첫차부터) - ‘10. 5. 20 : 전동차 개조(8편성 16량 - 1편성당 맨앞뒤 2량) ❍ 집 행 액 : 250백만원
향후계획		❍ 자전거 탑승시설 유지관리
성과	목표	❍ 이동로 설치 : 12개소 ❍ 전동차 개조 : 10량
	성과	❍ 이동로 설치 : 12개소 (23개소 설치완료) - 귤현, 박촌, 경인교대입구, 작전, 갈산, 부평시장, 부평, 간석오거리, 인천시청, 인천터미널, 선학, 신연수 ❍ 열차내 자전거 휴대탑승 확대실시(‘10.5.1부터 29개역 전구간) ❍ 전동차 개조 : 8편성 160량(1편성당 전동차 맨 앞뒤 2량)
	기대효과	❍ 도심형자전거 보급률 증대 및 생활속에서 편리하게 자전거를 이용할 수 있는 여건 제공 ❍ 지하철 시설물 개선사업을 통한 자전거 이용자 이용불편 해소 ❍ 시민들의 건강과 삶의 질 향상을 통한『친환경 국제도시』실현
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 지하철 자전거 탑승시설은 29개 전 구간에서 이용할 수 있도록 계획대로 완료

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 5		구 분	녹색교통			추진부서		교통관리과
사 업 명		도심 부설주차장 주차상한제
추진개요		❍ 사업내용 - 대중교통 여건이 양호한 도심지역의 주차장 설치 제한으로 승용차 이용 최소화 유도 - 市 주차장 조례에 따른 건축물 부설주차장 설치 기준 개정 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ ‘10. 3. 10 : 주차수요관리 전문가 자문회의 개최 ❍ ‘10. 5. 10 : 도심 부설주차장 실태조사 ❍ ‘10. 6. 2 : 연구용역 중간보고회 ❍ ‘10. 10. 4 : 연구용역 최종보고회 ❍ ‘10. 10. 8 : 용역완료
향후계획		❍ 주차정책 기본계획 수립 및 주차수요관리 시책 추진 ❍ ‘12년도부터 주차상한제 단계적 추진
성과	목표	❍ 주차상한제 시행방안 연구용역 ❍ 주차정책 기본계획 수립
	성과	❍ 주차상한제 시행방안 연구용역 완료
	기대효과	❍ 도심 상업지역의 주차공급관리로 승용차 이용을 억제하고, 대중교통 이용 유도 ❍ 도심지역 주차문제를 주차장 건설보다 적은 예산이 소요되는 주차수요관리로 개선 추진
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 도심지역 주차장 설치 제한(상한제)을 위한 시행방안 연구용역을 계획대로 완료

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 6		구 분	녹색교통			추진부서		교통관리과
사 업 명		도심 공영주차장 주차요금 조정
추진개요		❍ 사업내용 - 주차요금 급지체계를 토지이용, 대중교통 여건 등을 감안 개편 - 도심지역 주차요금 1급지 지역으로 지정하고 차별화 - 주거지역 등은 저렴한 주차요금 유지 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ ‘10. 10. 8 : 용역완료 ※ 인천광역시 주차요금 체계 개선방안(연구용역 결과) - 1급지 지역 : 구월, 부평, 주안, 계양권역 - 조정대상 주차장 : 29개소
향후계획		❍ 주차정책 기본계획 수립 및 ‘11. 하반기부터 주차 급지 조정
성과	목표	❍ 주차상한제 시행방안 연구용역 ❍ 주차정책 기본계획 수립
	성과	❍ 주차요금체계 개선방안 연구용역 완료 - 1급지 지역 : 구월, 부평, 주안, 계양권역 - 조정대상 주차장 : 29개소
	기대효과	❍ 대중교통 접근성이 양호한 도심 혼잡지역은 승용차보다 버스, 지하철을 이용하도록 하여 교통 혼잡 완화와 대중교통 산업 활성화 기여
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 인천광역시 주차요금 체계 개선방안 용역을 계획대로 완료

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 7		구 분	녹색교통			추진부서		교통기획과
사 업 명		청라～강서간 BRT 구축사업
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘06 ～ ’15 - 내용 : L=23.1Km(인천청라~경기부천~서울 신방화역, 화곡역) ❍ 사 업 비 : 7,956백만원 (국 3,978, 시 3,978) (인천시 부담금)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2. 23 : 실시설계 설계자문 완료 - ‘10. 4. 13 : 설계VE 심사 완료 - ‘10. 6. 20 : 실시설계 완료(1단계) - ‘10. 9. 14 : 1단계 공사착수 ❍ 집 행 액 : 7,956백만원
향후계획		❍ 1단계 공사완료(‘11. 12월)
성과	목표	❍ 실시설계 완료(‘10. 6. 20) ❍ BRT 공사 착수(‘10. 9. 14) - 인천청라 ～ 서울 화곡역, 19.8km
	성과	❍ 1단계 실시설계 완료(‘10. 6. 20) ❍ 1단계 공사착수(‘10. 9. 14)
	기대효과	❍『수도권광역교통계획』과 연계한 수도권 광역교통망 확충 ❍ 인천 서북부지역 대규모개발에 따른 장래 교통수요 대비 ❍ 신교통 시스템 도입으로 저탄소 녹색 교통 기반 마련
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 서울, 경기, 인천 부담사업으로 청라～강서간 BRT 구축사업을 계획대로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 8		구 분	녹색교통			추진부서		도시철도건설본부
사 업 명		인천 도시철도 2호선 건설
추진개요		❍ 사업내용 - 위치 : 서구 오류동~시청~인천대공원~남동구 운연동 - 규모 : 노선연장 L=29.3km, 정거장 27개소, 차량기지 2개소 - 기간 : ‘09 ~ ’14 ❍ 사 업 비 : 163,000백만원 (국 120,000, 시 43,000)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 4 : 도시철도 2호선 사업계획 승인 - ‘10. 5 : 도시철도 2호선 기본계획(변경)신청 (본부→국토해양부) * 주요내용 : 215공구 노선 및 공법 변경 - ‘10. 8 : 도시관리계획(변경) 결정 및 지형도면 고시 사업계획변경신청(본부→국토해양부) ※ ‘10. 12월 현재 공정율 19.05%(계획대비 89.83%) ❍ 집 행 액 : 151,509백만원
향후계획		❍ 차량 제작 착수(‘11), 토목구조물 완료(’12), 차량본선 시운전(‘13), 전구간 동시개통(’14. 7) 등
성과	목표	❍ 행정절차 이행 및 공사 추진
	성과	❍ 행정절차 이행 : 사업계획 승인, 도시관리계획 결정 ❍ 현재 공정률 : 19.05%
	기대효과	❍ 시민교통의 편익증진, 인천 구도심권역의 교통난 해소와 도시균형발전 및 세계일류 명품도시의 이미지제고
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 인천도시철도 2호선 건설사업을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 9		구 분	녹색교통			추진부서		대중교통과
사 업 명		도시형 자기부상열차 건설
추진개요		❍ 사업내용 - 구간 : 인천공항 교통센터～워터파크～공항철도 용유역사 - 규모 : 노선연장 L=6,371m, 정거장 6개소, 차량기지 1개소 - 기간 : ‘06. 12 ～ ’12. 12 - 시행자 : 국토해양부, 인천광역시, 인천국제공항공사 ❍ 사 업 비 : 93,400백만원 (국 67,900, 시 2,700, 공항공사 22,800)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1월 : 시범노선 대안입찰 낙찰대상자 선정(GS건설 컨소시엄) - ‘10. 1월 : 시범노선 건설공사 책임감리 선정 - ‘10. 3월 : 도시관리계획 결정 및 시설분야 건설공사 착공 - ‘10. 4월 : 사업계획 승인 - ‘10. 7월 : 실시계획 승인 - ‘10. 8월 : 기공식 ❍ 집 행 액 : 93,400백만원
향후계획		❍ 도시계획시설 변경 결정, 사업계획 변경 및 실시계획 변경 및 정거장 건축허가 ❍ ‘12. 12월 준공 및 시운전
성과	목표	❍ 행정절차 이행 및 건설공사 착공 추진
	성과	❍ 도시관리계획 결정, 사업계획 승인, 실시설계 승인 ❍ 기공식 (‘10. 8월) ❍ 현재 공정률 : 23%
	기대효과	❍ 자기부상열차 상용화를 위한 기반조성 ❍ 최첨단 공항과 연계하여 자기부상 열차의 브랜드 가치 극대화 ❍ 연간 CO2 실 감축량(탄소저감효과)
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 도시형 자기부상열차 건설사업을 계획대로 정산 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 10		구 분	녹색교통			추진부서		교통기획과
사 업 명		교통유발 시설물 특별관리
추진개요		❍ 사업내용 - 교통유발부담금 인상과 경감율 조정을 통한 교통유발요인 감축 ․시설물 : 13,809개소 ❍ 사 업 비 : 비 예산
추진실적		❍ ‘10. 5. 14 : 경감대상시설물 교통량 감축활동 점검계획 시달 ❍ ‘10. 6~7월 : 부담금 대상시설물 전수조사 실시(각 구) ❍ ‘10. 6. 15 : 국제행사 공식숙박업소 부담금 경감계획 수립 ❍ ‘10. 7~9월 : 부담금 대상시설물 전수조사 및 조례개정사항 (부담금인상 및 경감율 조정) 홍보 ❍ ‘10. 10월 : 2010년도 교통유발부담금 고지서 송달 ❍ ‘10. 10 ~ 12월 : 교통량 감축이행계획서 접수 및 시설물 관리
향후계획		❍ 체납 일제정리기간 운영
성과	목표	❍ 감면대상시설 실태조사 ❍ 시 조례 개정 홍보, 체납정리기간 운영
	성과	❍ 감면대상시설 실태조사 ❍ 시 조례 개정 홍보 : 안내문 발송 ❍ 체납정리기간 운영
	기대효과	❍ 경감대상시설물 전수조사 및 경감율 홍보를 통해 교통유발요인 감축으로 탄소발생 저감
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	● 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 교통유발 시설물에 대한 유발요인 실태조사를 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 11		구 분	녹색교통			추진부서		교통기획과
사 업 명		보행자 중심의 Green Parking사업 추진
추진개요		❍ 사업내용 - 위치 : 부평구 부평4동 일원 - 기간 : ‘10. 1 ～ ’11. 12 (1단계) - 내용 : 대상지내 건물 담장 철거 및 주차장 조성 보행자 중심의 골목환경 조성 경관조성 및 지역 방범시설 시스템 구축 등 ❍ 사 업 비 : 없음(당초 1,006백만원 전액 삭감)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1. 26 : 그린파킹 마을조성 사업 추진계획 수립 - ‘10. 2. 11 : 주민설명회 개최 - ‘10. 9. 7 : 그린파킹 마을조성 사업 재검토 요청(시←구) - ‘10.11. 23 : 사업취소 및 예산 삭감 (시→구) ❍ 집 행 액 : 사업취소로 예산 전액 삭감
향후계획		❍ 보행자 중심의 Green Parking사업 추진(대상선정)
성과	목표	❍ 주민동의 및 실시설계
	성과	❍ 사업취소
	기대효과	❍ 없음
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			● 취소			〇 재검토	〇 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 부평구 해당 지역주민의 동의가 이루어지지 않아 사업취소 및 예산삭감 조치 ※ 보행자 중심의 Green Parking사업은 개인 주택의 담장을 허물고 건물 내에 주차장을 설치하는 사업으로 반드시 건물주의 사업 참여 동의가 있어야 함.

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 12		구 분	녹색교통			추진부서		도시철도건설본부
사 업 명		도시철도 1호선 송도랜드마크시티 연장 건설공사
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘09. 3 ~ ’18. 12 (절대공기 : 60개월) - 구간 : 연수구 송도동 국제업무지구 ~ 송도 랜드마크시티 - 규모 : L=820m, B=9.6m(정거장 1개소) ❍ 사 업 비 : 31,700백만원 (국 12,800, 시 18,900)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3. 24 : 입찰안내서 심의(市 건설심사과) - ‘10. 4. 9 : 교통 및 환경영향평가 용역 착수 - ‘10. 9. 27 : 도시철도1호선 연장 기본계획변경 고시 - ‘10. 10. 29 : 도시관리계획(시설:철도)결정 요청(본부→대중교통과) ❍ 집 행 액 : 289백만원(잔액 계속비 이월)
향후계획		❍ 행정절차 이행, 기본 및 실시설계 용역 발주
성과	목표	❍ 행정절차 이행
	성과	❍ 행정절차 이행 - 입찰안내서 심의 - 교통 및 환경영향평가 용역 착수(‘10. 4. 9) - 기본계획 변경고시(‘10. 9. 29) 등
	기대효과	❍ 녹색교통수단인 도시철도 구축을 통한 도시경쟁력 제고 및 국․내외 투자자의 투자 촉진
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 도시철도 1호선 송도랜드마크시티 연장 건설공사 추진에 따른 행정잘차 이행을 계획대로 추진 ❍ 당초 결정된 공사의 Turn Key입찰방법에 대해 재검토 중에 있음

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 13		구 분	녹색교통			추진부서		도시철도건설본부
사 업 명		서울지하철 7호선 인천지역연장 건설공사
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘03. 3. ~ ’12. 12. - 구간 : 부평구 삼산근린공원(市 境界) ~ 부평구청역 - 규모 : 연장 2.4km, 3개 역사 ❍ 사 업 비 : 57,240백만원 (국 34,344, 시 22,896)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 9. 27 : 기본계획 변경 고시(사업기간 연장) - ‘10.10. 15 : 궤도공사 발주 - ‘10.12. 30 : 궤도공사 착수 ❍ 집 행 액 : 46,414백만원(잔액 계속비이월)
향후계획		❍ 본 공사 시행(‘12. 10월 개통 예정)
성과	목표	❍ 본 공사 시행, 궤도공사 착수
	성과	❍ 기본계획 변경고시(사업기간 연장)(‘10. 9. 27) ❍ 궤도공사 착수(‘10. 12. 30) ❍ 현재 공정률 : 82%
	기대효과	❍ 수도권 광역 교통 환승체계 확보로 안전하고 편리한 청정 녹색교통인 도시철도 이용 활성화
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 서울지하철 7호선 인천지역연장 건설공사를 계획에 따라 정상적으로 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 4 - 14		구 분	녹색교통			추진부서		도시철도건설본부
사 업 명		도시철도 친환경 신재생에너지 시스템 구축
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘09. 2 ~ ’14. 11 - 내용 : 역사설비 신재생에너지 시스템 설계 반영 ․지열에너지 시스템(35~65kW공급) : 정거장21개소, 차량기지 ․태양열 온수급탕 시스템(285~3,000ℓ공급) : 226, 227정거장, 차량 및 주박기지 ․태양광 발전 시스템(115kW발전) : 202, 207정거장, 차량기지 ❍ 사 업 비 : 도시철도 2호선 건설비에 포함
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 3. 31 : 실시설계 완료 - ‘10. 6. 15 : 지열시스템 관련 토목공정 인터페이스 협조 요청 - ‘10. 7. 20 : 1~4감리단 지열 열교환 파이프 우선시공 협조 요청 - ‘10. 12. 28 : 1~4감리단 지열 열교환 파이프 시공계획 제출
향후계획		❍ 토목 공정에 따라 정거장별 지열 1차 열교환 파이프 착공(2013년 4월 완료 예정)
성과	목표	❍ 실시설계 완료 및 공정관리
	성과	❍ 실시설계 완료 (‘10. 3. 31)
	기대효과	❍ 신재생에너지 설비시스템 적용 구축에 따른 저탄소․에너지 고효율화로 도시철도 녹색성장 구현
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 역사설비에 신재생에너지 시스템을 계획대로 설계에 반영

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 5 - 1		구 분	녹색일자리			추진부서		신성장동력과
사 업 명		강화 조력발전소 공동개발사업
추진개요		❍ 사업내용 - 위치 : 강화군 석모도 해역(강화~교동~서검~석모~강화) - 사업주체 : 인천시, 한국중부발전(주), (주)대우건설 컨소시엄(롯데․현대․코오롱) - 기간 : 2007년 ~ 2017년 - 용량 : 840㎿h(연간 1,556GWh) - 개요 : 조력댐 8.3km, 수차발전기 28기, 수문 18련, 통선문 3개소 ❍ 사 업 비 : 없음
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1. : 특수목적법인(SPC) 설립 - ‘10. 2. : 어민간담회 개최 - ‘10. 3. : 국토해양부 업무협의 - ‘10. 4. : 공동개발사업간 기관장 면담 - ‘10. 5. : 공유수면매립기본계획 수요조사 신청
향후계획		❍ 민관합동 검증위원회 구성․운영 - 문제점 재검증 및 검토결과에 따라 사업추진 여부 재논의
성과	목표	❍ 공유수면매립 기본계획 반영, 문화재현상변경 허가, 전원개발사업 실시계획 신청
	성과	❍ 재검토
	기대효과	❍ 신재생에너지 설비시스템 적용 구축에 따른 저탄소․에너지 고효율화로 도시철도 녹색성장 구현
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			● 재검토	〇 완료		〇 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 환경단체, 어민대책위원회에서 본 타당성조사 및 사전환경성검토의 검증 필요성 제기되어 민간검증위원회를 구성하여 강화갯벌 및 환경에 미치는 영향에 대한 전반적인 문제점 재검토

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 5 - 2		구 분	녹색일자리			추진부서		신성장동력과
사 업 명		무의도 해상풍력발전단지 공동개발
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘08년 ~ ’16년 - 위치 : 인천광역시 중구 무의도 해역 - 발전용량 : 97.5㎿(연간 266GWh) - 사업주체 : 인천광역시, 한국남동발전(주), 한화건설 ❍ 사 업 비 : 130백만원(민자)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 1 : 무의도 풍속측정 완료 - ‘10. 3 : 무의도 예비타당성 조사 완료 - ‘10. 12 : 대초지도 풍속측정 완료 ❍ 집 행 액 : 130백만원
향후계획		❍ 대초지도 예비타당성 조사 착수, 해저지형 조사 및 각종 인․허가 절차 수행 ❍ ‘13년 착공, ’16년 준공 예정
성과	목표	❍ 무의도 풍력자원조사 및 분석 측정기 설치 ❍ 무의도 사업 타당성 분석 ❍ 대초지도 풍력자원조사 및 분석 측정기 설치
	성과	❍ ‘10. 1월 무의도 풍속측정 완료 ❍ ‘10. 3월 무의도 예비타당성 조사 완료 ❍ ‘10. 12월 대초지도 풍속측정 완료
	기대효과	❍ 탄소저감효과 : 110,000tCO2/년(탄소배출권 연간 20억원 확보) ❍ 인천광역시 연간 총 전력사용량의 1.4%를 대체 ❍ 태양광 발전시 여의도 면적 1.6배 대체하는 발전규모
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 무의도 해상풍력발전단지 개발사업을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 5 - 3		구 분	녹색일자리			추진부서		신성장동력과
사 업 명		덕적도 조류발전단지 공동개발
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘09년 ~ ’16년 - 위치 : 인천광역시 옹진군 덕적도 해역 - 발전용량 : 200㎿(연간 613.2GWh) - 사업주체 : 인천광역시, 옹진군, 한국남동발전(주), 포스코건설, 인하대학교 ❍ 사 업 비 : 600백만원(민자)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 9 : 조류자원 기조초사 완료 - ‘10. 10 : 조류발전기 제작공장 및 시운전 현장 확인 - ‘10. 12 : 국․내외 조류발전 기종 선정 검토 ❍ 집 행 액 : 600백만원
향후계획		❍ 조류발전시설 성능검사 및 평가 ❍ ‘15년 착공, ’16년 준공 및 상업운전 개시
성과	목표	❍ 조류자원조사 및 분석 ❍ 예비타당성 분석
	성과	❍ 조류자원 기초조사 완료(‘10. 9)
	기대효과	❍ 탄소저감효과 : 260,000tCO2/년(탄소배출권 연간 52억원 확보) ❍ 조류발전사업으로 인천시 연간 총 전력사용량의 3.2%를 대체
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 덕적도 조류발전단지 개발사업을 계획대로 정상 추진

단위사업별 점검․평가표
관리번호		4 - 5 - 4		구 분	녹색일자리			추진부서		신성장동력과
사 업 명		해양바이오에너지 개발
추진개요		❍ 사업내용 - 기간 : ‘09년 ~ ’18년 - 사업주체 : 인하대학교 산․학협력단 - 내용 ․바이오디젤 추출기술 및 생산기술개발 ․바이오알코올 추출기술 및 생산기술 개발 ․우수 종 탐색 및 생태계 관리 ❍ 사 업 비 : 1,600백만원(국)
추진실적		❍ 추진실적 - ‘10. 2월 : 바이오에너지(디젤, 에칸올) 생산기술 개발 착수 - ‘10. 10월 : 바이오디젤 생산용 광생물기 설치(강화대교 하류 해수면) ❍ 집 행 액 : 1,600백만원
향후계획		❍ 1단계 기초기술개발(바이오디젤, 바이오알콜,, 생태계관리)
성과	목표	❍ 바이오디젤 기초기술 ❍ 바이오알콜 기초기술 ❍ 우수종 개량 및 생태계 관리기술
	성과	❍ 바이오에너지(디젤, 에칸올) 생산기술 개발 착수 ❍ 바이오디젤 생산용 광생물기 설치(강화대교 하류 해수면)
	기대효과	❍ 해양에너지 선진도시 구축 ❍ 해양바이오에너지 기초기술 확보와 관련 연구 고급인력 양성 ❍ 해양바이오 에너지 관련 산업육성을 통한 일자리 창출
결 과			계 획 변 경				추 진 결 과
			〇 취소			〇 재검토	〇 완료		● 정상		〇지연/미흡
평가결과		❍ 해양바이오에너지 개발사업을 계획대로 정상 추진